문서번호	시설보수과-3647
결재일자	2014.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
김희철		김호규	09/24 박용선
협 조

Bridge 창의뱅크

『2014년 도로시설물 일상유지보수공사』

공사현장 실정사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  9.

시설보수과

2014년 도로시설물 일상유지보수공사

공사현장 실정사항 검토보고

Ⅰ		관련근거

▣ 2014-동부-09-02(2014.9.23.) “3차 작업지시 실정보고서 제출”

Ⅱ		공사현황

▣ 공 사 명 : 2014년 도로시설물 일상유지보수공사

▣ 공사기간 : 2014. 4. 08 ~ 2015. 2. 28

▣ 공사개요 : 아스팔트 절삭후 덧씌우기 70a, 교면방수 1,530㎡

콘크리트 표면보수 1,243㎡, 콘크리트 단면복구 437㎡

▣ 도 급 자 : 이안종합건설㈜ 대표 임재민

▣ 공 사 비 : 914,988,600원

Ⅲ		보고내용

구 분	시설명	실정보고 내용	검토결과	비 고
3차 작업 지시	가락 지하 차도	- 당초 3차작업지시시 표면보수 80㎡ 주간에 시행토록 작업지시하였으나 공사위치가 U-Type 안쪽 및 박스 내부에 위치하여 교통체증 및 안전사고 발생 우려가 있어 야간에 보수공사 시행코자 함	- 주간에 가락지하차도 차선통제시 교통체증 및 안전사고 방지를 위하여 야간으로 변경하여 시행 코자 함 - 공사비 변경 : 증2,280천원

Ⅳ		조치의견

▣ 위와 같이 공사의 안전성을 감안하여 우선 작업시행 지시코자 하며, 추후 설계변경(정산) 시행코자 함.

붙  임 : 1. 변경작업지시서(가락지하차도) 1부.

2. 설계도면(가락지하차도) 1부.  끝.