함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2014년 정수장 전기설비 보수공사(연간단가))

1. 우리 정수센터에서 시행중인 『2014년 정수장 전기설비 보수공사(연간단가)』와 관련하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 정수장 전기설비 보수공사(연간단가)

○ 도 급 자 : ㈜장학전력 대표자 정진호

○ 도 급 비 : 43,864,790원

○ 공사기간 : 2014.4.21. ~ 2014.12.31.

나. 설계변경

○ 설계변경 금액 (계약금액 변경없음)

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증·감액(원)
도 급 비	43,864,790	43,864,790	-

○ 설계변경사유

- 공종별 계약물량 증․감 및 신규공종 발생에 따른 물량 변경

다. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

붙 임 : 1. 설계변경 심의 소위원회 개최결과 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부. 끝.

주무관	노성제		정수시설과장	박심근		구의아리수정수센터소장	09/24 오세영
협조자	주무관	김동석
시행	정수시설과-2215	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 광나루로 571 (구의동)	/
전화	02-3146-5476	/전송	02-3146-5409	/	nsj@seoul.go.kr	/	대시민공개