투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	우이신설 시스템분야 책임감리원
(경유)
제목	실시계획 변경(공사기간 변경) 협의 관련 검토 지시

1. 도시철도사업부-5833호(2014.9.22.) 관련입니다.

2. 상기 대호와 관련으로 ｢우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업｣ 사업시행자로부터 공사기간 변경(26.5개월 연장)에 대한 실시계획 변경 승인 신청이 있어 관련 자료를 첨부하오니 공사 추진일정 적정여부 등 검토의견을 조속히 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 관련공문 사본 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김한수		신호과장	09/24 김영하
협조자
시행	도시철도설비부-8691	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산 5-85 서울시청 남산별관 4층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7327	/전송	02-772-7308	/	hansvii@seoul.go.kr	/	대시민공개