문서번호	설비부-10467
결재일자	2014.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
조기성	이흥복	09/24 代권오식

『중동빗물펌프장 증설 기계공사』 관급자재 납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  9.

도시기반시설본부

설비부

『중동빗물펌프장 증설 기계공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

「중동빗물펌프장 증설공사」와 관련하여 선행공정(토목) 지연에 따른 관급자재 납품기한 연기를 아래와 같이 검토 보고 드림

Ⅰ				공사개요

◦ 공사규모 : 펌프 260kW × 1대, 135kW × 1대 증설

◦ 공사기간 : ’13. 01. 04 ~ ’14. 09. 30

◦ 공 사 비 : 1,111백만원(기계)

◦ 관급자재 : 배수펌프, 수문, 제진기, 크레인, 밸브류, 냉난방기

◦ 시 공 사 : 이엔디엔지니어링(주) / 감독위탁 : 서울시 시설관리공단

Ⅱ				관련근거

◦ 공사감독3처-8995(’14.09.23) : 관급자재 납품기한 연기요청

Ⅲ

	관급자재 계약현황

자재명		납품요구번호	계약자	계약금액 (천원)	납품기한
					당 초	변 경
배수펌프		12132100200	남강펌프	274,000	’14. 09. 30	’15. 02. 28
수 문		12131026700	우일산업	79,000
제진기		12132068800	온누리유공자 복지회	520,000
크레인		12132086000	에이치아이	58,512
밸브	체 크	121311401600	동양밸브	65,459
	B.F.V
	신축관	121311403200
냉·난방기		121323997500	삼성전자(주)	11,956
		121323998800
		121323998900

Ⅳ

	납품기한 연기보고

◦ 연기사유 : 선행 공종인 토목(건축)공사 지연에 따른 관급자재 설치시기 미도래

◦ 납품기한 연기 : ’15. 02. 28

◦ 귀책소재 : 도시기반시설본부

◦ 지체상금 부과여부 : 미부과

◦ 감리의견 : 선행 공사 지연에 따른 관급자재 설치시기 미도래 및 토목, 건축

공사기간 감안하여 납품기한 연장 필요

Ⅴ				보고자 의견

◦ 감리 검토의견이 타당하므로 납품기한을 연기하고 향후 공사 공정관리에 만전을 기하고자 함

따로붙임 : 공사감독 납품기한 연기검토 보고서  1부.     끝.