투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	하늘공원 노후전망데크 정비공사 설계변경

1. 시설과-(2014.8.20.)호와 관련입니다.

2. 하늘공원 노후전망데크 정비공사에 대한 설계변경을 다음과 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 하늘공원 노후전망데크 정비공사

나. 위    치 : 월드컵공원내 하늘공원

다. 공사개요 : 목재데크 철거 및 재설치

라. 공사기간 : 2014. 7. 7 ~ 9. 30

마. 총공사금액┌ 당 초 : 83,787,000원

└ 변 경 : 95,167,000원

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 감 액	비 고
계		83,787,000	95,167,000	증11,380,000
	공급가액	76,170,000	86,515,455	증10,345,455
	부가세	7,617,000	8,651,545	증1,034,545

바. 도 급 자 : 거삼조경  대표 예종서

사. 변경사유 : 현장여건에 따른 물량 증감(변견내역서 참고)

아. 예산과목 : 서부공원녹지사업소운영, 월드컵공원 시설물 보수정비, 시설비(401-01)

붙임 1. 실정보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제비율검증 1부.  끝.

주무관	정순주		★주무관	이수환		토목시설팀장	代김현숙		시설과장	한성현
서부공원녹지사업소장	09/24 안해칠
협조자
시행	시설과-4677	(		)	접수		(		)
우	121-850	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02)300-5535	/전송	02)300-5569	/	jsj130@seoul.go.kr	/	대시민공개