의원 요구 자료 제출

시 행	도로계획과-12307
결재일자	2014.9.25.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		도로정책팀장	도로계획과장	시설안전정책관	도시안전실장	결재
김연홍		이승석	형태경	한제현	09/25 조성일
협 조
	광역도로계획팀장				방영복
	도로시설계획팀장				한정수
	간선도로계획팀장				김기용
	민자사업팀장				정회원

제 목	의원 요구자료 제출 (요구번호 974번, 민홍철국회의원, 국토교통위원회)

□ 민홍철의원 요구자료를 붙임과 같이 제출하고자 합니다.

따로붙임 : 민홍철국회의원 요구자료 1부.  끝.

민홍철 의원(국토교통위원회, 새정치민주연합)

요구번호 : 974번

36. 2010년 이후 서울시 도로건설사업 현황

□ 의원님께서 요구하신 자료를 아래와 같이 제출합니다.

2010년 이후 서울시 도로 건설사업 현황

연번	사 업 명	사업내용(개요)	추진사항
1	경인로～구로1동간 도로개설	◦위 치 : 구로구 구로동 경인로(롯데마트 앞) ~ 구로1동 우성아파트앞 ◦규 모 : B=10~20m, 연장 311m ◦사업기간 : 2007.10 ~ 2010.12 ◦총사업비 : 13,922백만원	◦ 2010년 준공
2	구로1교 주변 도로구조 개선	◦위 치 : 구로2교∼구로1교∼디지털단지역간 ◦규 모 : 교량설치(2개소) 폭 36m, 연장 36.7∼37.5m ◦사업기간 : 2008.12~2010.12 ◦총사업비 : 4,800백만원	◦ 2010년 준공
3	시흥대로~은행나무길간 도로확장	◦위 치 : 금천구 시흥대로 ∼ 은행나무 5거리간 ◦규 모 : 도로확장 B=10→20m, L=651m ◦사업기간 : 2004~2010 ◦총사업비 : 45,630백만원	◦ 2010년 준공
4	이화교 재설치	◦위 치 : 중랑구 중화동 305 ~ 동대문구 이문동 51간 ◦규 모 : 교량건설 폭 20~35m, 연장 220m ◦사업기간 : 2003~2010 ◦총사업비 : 40,700백만원	◦ 2010 준공
5	일원동 474번지 도로개설	◦위 치 : 강남구 일원동 85-1 ~ 474-1 ◦규 모 : 도로개설 B=30m, L=275m ◦사업기간 : 2006~2010 ◦총사업비 : 9,878백만원	◦ 2010 준공
6	구로동길 확장	◦위 치 : 구로동 730-76 ~ 730-80 ◦규 모 : 도로확장 폭20m→ 23m, 연장 30m ◦사업기간 : 2010.1~2011.12 ◦총사업비 : 2,458백만원	◦ 2011년 준공
7	다산로 확장	◦위 치 : 신당동 432-2743 ~ 432-2796 ◦규 모 : 도로확장 폭 28~33m, 연장 287m ◦사업기간 : 2006~2011 ◦총사업비 : 5,435백만원	◦ 2011년 준공
8	신정로 확장	◦위 치 : 양천구 신정동 329-8 ~ 목동 404-3호간 ◦규 모 : 도로확장 폭 25→ 30m, 연장 912m ◦사업기간 : 2010 ~ 2011 ◦총사업비 : 2,700백만원	◦ 2011년 준공
9	올림픽대로 (반포~청담) 구조개선	◦위 치 : 서초구 반포동 ~ 강남구 삼성동 ◦규 모 : 부가차로 설치 4.63km ◦사업기간 : 2006~2011 ◦총사업비 : 20,078백만원	◦ 2011년 준공
10	여의도 샛강 문화다리 설치	◦위 치 : 신길역~여의도동 광장APT ◦규 모 : 보도교 폭4.5m,연장354m ◦사업기간 : 2004~2011 ◦총사업비 : 16,822백만원	◦ 2011년 준공
11	남부순환로~ 부천시계간 도로개설	◦위 치 : 개봉동 307-6 ~ 구로구 항동 산50-3 ◦규 모 : 도로개설 폭23~30m, 연장 3,974m ◦사업기간 : 1999 ~ 2012.1. ◦총사업비 : 200,500백만원	◦ 2012년 준공
12	남부순환로(신월지하차도주변) 도로확장	◦위 치 : 양천구 신월동 548-1 ~ 신월IC ◦규 모 : 도로확장 폭 6~7 → 8차로, 연장 880m ◦사업기간 : 2010.5 ~ 2012.5 ◦총사업비 : 2,900백만원	◦ 2012년 준공
13	두무개길 교차로 구조개선	◦위 치 : 두무개길 한남교차로, 금호교차로 ◦규 모 : 교차로 구조개선 1개소, 한강접근로 1개소 ◦사업기간 : 2004~2012 ◦총사업비 : 28,100백만원	◦ 2012년 준공
14	사당로(남성초교~구범진여걕) 확장	◦위 치 : 사당동 남성초교 ~ 구 범진여객간 ◦규 모 : 도로확장 폭 25→30m, 연장 460m ◦사업기간 : 2007.4 ~ 2012.8 ◦총사업비 : 16,527백만원	◦ 2012년 준공
15	위례성길 ~ 성내천복개도로간 도로개설	◦위 치 : 송파구 오금동 104 ~ 마천동 5번지 ◦규 모 : 도로개설 폭 30~35m, 연장 1,360m ◦사업기간 : 2004~2012 ◦총사업비 : 84,111백만원	◦ 2012년 준공
16	헌릉로(세곡임대주택단지~헌릉IC) 확장	◦위 치 : 강남구 세곡동 세곡임대주택단지 ~ 헌릉IC ◦규 모 : 도로확장 폭6차로→10차로, 연장 568m ◦사업기간 : 2008~2012 ◦총사업비 : 18,197백만원	◦ 2012년 준공
17	구로역~ 남부순환로간 도로개설	◦위 치 : 구로동 584-12~가리봉동 2-137 ◦규 모 : 폭20m,연장650m ◦사업기간 : 2007~2012 ◦총사업비 : 42,000백만원	◦ 2012년 준공
18	보국문길 입구 교통광장 조성(2010신규)	◦위 치 : 성북구 정릉동 164-76 일대 ◦규 모 : 교통광장 조성 A=663㎡ ◦사업기간 : 2008~2012 ◦총사업비 : 5,609백만원	◦ 2012년 준공
19	이촌역 ~ 중앙박물관 간 지하보도 건설	◦위 치 : 용산구 이촌역~중앙박물관 ◦규 모 : 지하보도 B=8.3m, L=255m ◦사업기간 : 2008~2012 ◦총사업비 : 15,000백만원	◦ 2012년 준공
20	천호동 55~217 간 도로개설	◦위 치 : 강동구 천호동 55-28~217-9 ◦규 모 : 도로개설 폭 4차로.연장 580m ◦사업기간 : 2006~2012 ◦총사업비 : 55,141백만원	◦ 2012년 준공
21	관악 은천길 도로확장	◦위 치 : 은천길 현대시장 ~ 관악로 강남고려병원 앞 ◦규 모 : 폭 3→4차로, 연장 950m ◦사업기간 : 2007~2013 ◦총사업비 : 19,600백만원	◦ 2013년 준공
22	경인로~신도림동387간 도로개설	◦위 치 : 구로구 신도림동 432-15~ 387간 (남․북간) ◦규 모 : 도로개설 폭 6차로, 연장 347m ◦사업기간 : 2002. ~ 2013.8. ◦총사업비 : 45,400백만원	◦ 2013년 준공
23	성동교 확장 및 연결도로개설 (12년신규)	◦위 치 : 성동구 행당동 행당중 앞 ◦규 모 : 성동교 확장 1차로 L=200m ◦사업기간 : 2012~2013 ◦총사업비 : 1,500백만원	◦ 2013년 준공
24	마장지하차도 도로구조개선	◦위 치 : 성동구 마장동 498번지 ◦규 모 : 경원선 재설치 (폭 11.8m, 연장 35m) 지하차도 재설치 (폭 8.5→15.2m, 연장135m) ◦사업기간 : 2009~2013 ◦총사업비 : 15,800백만원	◦'12.08 : 공사 착수 ◦'14.01 : 준공
25	도림교 확장	◦위 치 : 구로구 신도림동 도림교 ◦규 모 : 교량확장 폭 6→9차로, 연장 84m ◦사업기간 : 2011.~2014. 4. ◦총사업비 : 41,800백만원	◦'12.06 : 공사계약 및 착수 ◦'14.04 : 준공
26	월계2교외 1개소 확장	◦위 치 : 노원 월계2교, 마포 성산2교 ◦규 모 - 월계2교 : 차도․보도확장 폭 25→ 30m, 연장 31m - 성산2교 : 보도 확장 폭 30→32~33m, 연장 34m ◦사업기간 : 2012～2014 ◦총사업비 : 2,500백만원	◦'13.05 : 공사계약 ◦'14.05 : 준공
27	용마터널	◦위 치 : 중랑구 면목동 ~ 구리시 아천동 ◦규 모 - 규 모 : 4차로, 연장 3.57km - 기 간 : 2009. ~ 2014. - 총사업비 : 178,600백만원(시비 61,400)	◦'09.11 : 공사 착수 ◦'13.9월 현재 : 공정률 97% ◦'14.11.21 : 개통예정
28	방화대교남단 접속 도로건설	◦위 치 : 강서구 방화동 방화대로 ~방화대교남단 올림픽대로 ◦규 모 : 폭 1~ 3차로, 연장 3.53km ◦사업기간 : 1995~2015.10 ◦총사업비 : 109,800백만원	◦ '08.12 ~'09.11: 변경설계 시행 ◦ '12.03.28 : 중앙투자심사(행안부) ◦ '12.06.05 : 마곡지구 광역교통 개선대책 변경 심의 완료(국토부) ◦'14.9월 현재 :공정율 85%
29	도봉4번지 ~의정부시계간 도로개설 (상도교~호장교간 도로개설)	◦위 치 : 도봉동 4번지 일대 ~ 의정부시계간 ◦규 모 : 도로개설 폭 25m, 연장 280m ◦사업기간 : 2008~2017 ◦총사업비 : 4,551백만원	◦ 실시설계중(2014.9) 보완 (의정부시) ◦ 보상 및 개발재한구역훼손 부담금 납부 ◦ 2017년 준공예정
30	신림 ~ 봉천 터널 건설	◦위 치 : 관악구 신림동(시흥IC) ~봉천7동 (낙성대) ◦규 모 : 도로개설 (터널) 폭 4차로 연장 5.58km ◦사업기간 : 2007~2018이후 ◦총사업비 : 550,700백만원	◦'10.10 : 공사 착수 ◦'14.9월 현재 : 공정율 12%
31	감일~초이간 광역도로 개설	◦ 위 치 : 강동구 상일동(천호대로) ~ 하남시 감일동 ◦ 규 모 : 도로개설 폭 6차로, 연장 5.63㎞(서울시 구간 0.14㎞) ◦사업기간 : 2004 ~ 2015 ◦ 총사업비 : 14,749백만원 - 서울시 구간 사업비 7,400백만원 (국비 50%)	◦'11.12 : 사업시행 협약 체결 (서울시↔하남시) ◦'12.02 : 공사착공 (하남시) ◦'14.9월 현재 : 공정율 97%
32	서부트럭 터미널 앞 지하차도 건설	◦위 치 : 양천구 남부순환도로상 서부트럭터미널앞 교차로 ◦규 모 : 지하차도 설치 폭 4차로, 연장 1,075m ◦사업기간 : 2008～2014.10 ◦총사업비 : 81,914백만원	◦'08.03 : 공사 착공 ◦'12.11 : 오류IC 방향 지하차도 임시 개통 ◦'13.12 : 4차로 전구간 개통 ◦'14.9월 현재 : 공정율 99%
33	강남순환도시고속도로건설	◦위 치 : 금천구 독산동(소하CT)~ 강남구 일원동(수서IC) ◦규 모 : 폭 6~8차로, 연장22.9km ◦사업기간 : 1994～2016 ◦총사업비 : 1조 5,514억원 (민자 5,371억원 별도)	◦'07.05 : 4공구 착공 ◦'07.11 : 민자구간 (5,6,7공구)착공 ◦'09.03 : 8공구 착공 ◦'13.08 : 과천시구간 도시계획결정 ◦'14.09 : 과천시구간 실시계획인가고시 추진 ◦'14.9월 현재 : 공정율 57%
34	고척교 확장	◦위 치 : 구로구 구로동 고척교 ◦규 모 : 차로폭 : 8→10차로, 보도폭 : 4m → 21m ◦사업기간 : 2012. ~ 2014. 9 ◦총사업비 : 20,200백만원	◦'13.04 : 공사 착공 ◦'14. 9월 현재 :공정율 40% - 교대 4개소, 교각 14개소 기초공사 완료
35	디지털3단지~ 두산길간 지하차도 건설	◦위 치 : 디지털3단지(가산동319-10) ~ 두산길(독산1동 998-10) ◦규 모 - 도로개설 폭 4차로, 연장453m (지하차도 폭 2차로, 연장 310m) - 서부간선도로 진출램프 (폭 1차로, 연장 235m) ◦사업기간 : 2012. ~ 2016. ◦총사업비 : 45,300백만원(구비 2억원 포함)	◦'14.9월 현재 : - 유관기관 협의 및 실시설계 중(’14.10 설계준공 예정) - 보상측량 실시 중
36	동부간선도로 (월계1교~의정부시계) 확장	◦위 치 : 동부간선도로 월계1교 ~의정부시계 ◦규 모 : 도로확장 폭 4→6~7차로, 연장 6.85km, 경원선이설 1.16㎞ ◦사업기간 : 2004～2017 ◦총사업비 : 383,500백만원 (국비 62,100, 시비 276,400, LH 45,000)	◦'07.10 : 공사계약 ◦'08.07 : 하천점용허가 및 착공 ◦'14.9월 현재 : 공정율 45%
37	율곡로(창경궁앞)구조개선	◦위 치 : 종로구 창덕궁 돈화문~원남동사거리 ◦규 모 : 도로확장 폭 4→6차로, 연장 800m(지하차도 342m) ◦사업기간 : 2008～2015 ◦총사업비 : 85,400백만원	◦‘10.10 : 공사착수 ◦'14.9월 현재 : 공정율 36%
38	용비교 ~ 행당중간 도로개설	◦위 치 : 성동구 금호동 용비교서측 ~행당동 행당중 ◦규 모 : 도로개설 및 확장 5~6차로, 연장 2,332m ◦사업기간 : 2007～2016 ◦총사업비 : 71,000백만원	◦'07.03 : 공사계약 및 착수 ◦'14.9월 현재 : 공정율 80%
39	응봉교 재설치	◦위 치 : 성동구 응봉동~성수동(응봉교) ◦규 모 : 교량설치 폭 6차로, 연장693m ◦사업기간 : 2001～2015 ◦총사업비 : 78,500백만원	◦'08.10 : 공사착수 ◦'14.9월 현재 : 공정율 80%
40	겸재교 건설	◦위 치 : 중랑구 면목동(동2로) ~동대문구 휘경동(한천로) ◦규 모 - 교량건설 폭 15~18m(4차로), 연장 395m, - 도로확장 폭 4→6차로 (20~25m →30~33m), 연장 750m ◦사업기간 : 2003～2016 ◦총사업비 : 113,600백만원	◦'08.10 : 공사착수 ◦'14.9월 현재 : 공정율 70% - 동대문구, 중랑구 측 접속교량 공사중
41	월드컵대교건설	◦위 치 : 마포구 상암동~영등포구 양평동 ◦규 모 : 교량건설 폭 6차로, 연장1.98km◦사업기간 : 1999~2019 ◦총사업비 : 355,000백만원	◦'10.03 : 공사착수 ◦'14.9월 현재 : 공정율 20%
42	서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선	◦위 치 : 용산구 보광동 36-10 ~ 서빙고동 271-79 ◦규 모 : 서빙고고가교 축소 재가설 폭 4차로→1~2차로, 연장755m ◦사업기간 : 2009～2015 ◦총사업비 : 27,300백만원	◦'10.12 : 공사계약 ◦'14.9월 현재 : 공정율 52%
43	신사사거리 ~고양시계간 도로개설	◦위 치 : 은평구 신사동~고양시 향동동 ◦규 모 : 도로개설 폭 4차로(25m), 연장 1,077m(터널구간 366m 포함) ◦사업기간 : 2004～2015 ◦총사업비 : 44,800백만원 (국비50%)	◦'05.04~‘10.02 : 신사사거리~덕산중학교간 공사 완료 ◦'11.10 : 고양시와 협약 체결 ◦'12.12 : 터널구간 공사착공 ◦'14.9월 현재 : 공정률 40%
44	덕송~상계간 광역도로 개설	◦위 치 : 노원구 상계동~별내동 ◦규 모 : 도로개설 폭 25m(4차로), 연장 0.84km(총연장 2.38km) ◦사업기간 : 2007～2015 ◦총사업비 : 23,900백만원 (국비50%)	◦'10.09 : 남양주시와 협약서 체결 ◦'14.9월 현재 : 공정율 65% ※ 협약에 따라 보상은 서울시(노원구) 시행, 공사는 전구간 남양주시 시행
45	사가정길~암사동간 도로개설 (암사대교 건설)	◦위 치 : 강동구 암사동~구리시 아천동 ◦규 모 : 도로건설 폭 4~6차로, 연장 2.74km - 교량 1.13km, 연결도로 1.61km ◦사업기간 : 2001 ~ 2015 ◦총사업비 : 383,100백만원	◦'06.04 : 보상 및 공사 착수 ◦'14.9월 현재 : 공정율 94%
46	선사로~고덕지구간 도로확장	◦위 치 : 강동구 암사동 440-1 ~고덕동 140간 ◦규 모 : 도로 확장 폭 2→4~6차로, 연장 3,720m ◦사업기간 : 2005 ~ 2015 ◦총사업비 : 127,200백만원 (시비 572억원, LH공사 700억원)	◦'09.01 : 공사 착공 ◦'11.01 : 추가 도로확장 설계 완료 ◦'14.9월 현재 : 공정율 51%
47	남부순환로 (개봉역 주변) 구조개선	◦위 치 : 구로구 개봉동 198-1번지 일원(개봉역 앞) ◦규 모 : 남부순환로 구조개선 L=1,160m (지하차도 736m 포함) ◦사업기간 : 2002 ~ 2015 ◦총사업비 : 58,600백만원	◦'07.09 : 공사시행 ◦'12.05 : 지하차도 임시개통 (구로IC 방향) ◦'14.9월 현재 : 공정율 97%
48	망우리고개 횡단교량 설치	◦위 치 : 중랑구 망우동 산51-4 주변 (망우로 구리시계) ◦규 모 : 교량설치 폭 15m, 연장 45m ◦사업기간 : 2013. 03. ~ 2015. 12. ◦총사업비 : 2,988백만원	◦'13.12 : 타당성 및 기본계획용역완료 ◦'14.9월 현재 : 기본 및 실시설계용역 시행중
49	사가정길(장안삼거리~전농동사거리간) 확장	◦위 치 : 전농사거리 교차로 확장, 배봉사거리 교차로 확장 ◦규 모 : 왕복5차로 → 왕복 6차로, 연장 520m ◦사업기간 : 2010. ~ 2015 ◦총사업비 : 7,964백만원	◦'14.2 : 기본 및 실시설계 용역완료 ◦'14.9월 현재 : 실시계획 고시 준비중
50	시조사삼거리 교차로구간 개선	◦위 치 : 동대문 휘경동 시조사삼거리 ◦규 모 : 폭 30 → 33m, 연장 300m ◦사업기간 : 2013. ~ 2015. ◦총사업비 : 1,887백만원	◦'13.11 : 타당성용역 완료 ◦'14.9월 현재 : 실시설계 용역 시행중
51	성암로 병목구간 개선	◦위 치 : 마포구 중동 200 ~ 중동 26-3 ◦규 모 : 도로확장 폭 4차로, 연장 250m ◦사업기간 : 2012~2015 ◦총사업비 : 7,250백만원	◦'14.02 : 공사 착공 ◦'14.9월 현재 : 공정율 30%
52	도림로 확장	◦위 치 : 영등포구 도림동 160-88 ~ 신길동 421-16 ◦규 모 : 도로확장 폭 25→30m, 연장 1,150m ◦사업기간 : 2009~2016 ◦총사업비 : 29,300백만원	◦ ‘14.02.05 : 공사 착공 ◦ ‘14.9월 현재 : 공정율 80%
53	한강상 교량 연결램프 구조개선	◦위 치 : 동호·올림픽대교 남단, 한남·성수대교 북단 IC ◦규 모 : 연결램프 구조개선 4개소 ◦사업기간 : 2012~2017 ◦총사업비 : 76,100백만원	◦'13.02 : 기본계획 완료 ◦'13.05 : 설계 착수 ◦'14.9월 현재 : 설계 중

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로계획과)	담당사무관	이승석
	☎2133-8063	주무관	김연홍
	작 성 일 : 2014년 9월 일