문서번호	녹지관리과-9605
결재일자	2014.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
김대수	박병구	김윤철	09/25 이용태
협 조

“한양도성 순성길(남산.낙산) 조성공사 폐기물처리용역”

준공기한 연기 검토보고

2014. 09.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

한양도성 순성길(남산.낙산) 조성공사 폐기물처리용역』

준공기한 연기 검토보고

『한양도성 순성길(남산.낙산) 조성공사 폐기물처리용역』과 관련하여 준공  기한을 연기하고자 아래와 같이 보고합니다.

용역현황

❍ 용 역 명 : 한양도성 순성길(남산.낙산) 조성공사 폐기물처리용역

❍ 용역기간 : 2013.12.18 ~ 2014.09.30.

❍ 도 급 비 : 금19,990,000원

❍ 용역개요

- 폐기물 : 폐콘크리트 운반 203.04㎡

- 폐기물운반 : 531.41㎡

❍ 도 급 자 : ㈜목화산업 대표 김 일 수

준공기한 연기검토

❍ 연기기간

- 당  초 : 2013.12.18 ~ 2014.09.30

- 변  경 : 2013.12.18 ~ 2014.11.30.

❍ 연기사유

- 공사 대상지내 체육시설물 이설 및 가설 건물 철거 건에 대해 민원인(남산체육회회장,대책위원장)과 면담을 거쳐 이설 등에 합의 시행하여 왔으나 2014.09.07. 체육회 이설 지역에 추가로 시설물을 설치하여 달라는 민원을 제기하여 여러차레 면담하였으나 체육시설물 이설 및 가설 건물 철거에 협조하지 않아 공사 진행이 지연되었으며, 2014.09.19. 남산체육회 측과 면담결과 이설 등에 협조하기로 하여 공사진행 하였으나 후속 공정 시행과 관련된 폐기물처리 소요기간이 절대 부족함에 따라 용역 준공 기한을 연기하고자 함.

❍ 지체상금 부과여부 검토

- 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

조치의견

❍ 상기 검토결과와 같이 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 용역 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.