문서번호	방재시설부-9371
결재일자	2014.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
한종수		김흥근	09/25 임춘근
협조

용허리 빗물저류조 설치공사 폐기물처리용역

준공기한 연기 검토 보고

2014.  9.

서울특별시도시기반시설본부

(방재시설부)

『용허리 빗물저류조 설치공사 폐기물처리용역」

준공기한 연기 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인「용허리 빗물저류조 설치공사 폐기물처리용역」에 대해 책임감리원으로부터 준공기한 연기검토가 접수되어 이에 대해 검토 보고 드림.

1		관련근거

▢ 잠원2감 2014-240호('14.9.24) : 폐기물처리용역 공기연장 검토보고

2		용역개요

▢ 용 역 명 : 용허리 빗물저류조 설치공사 폐기물처리용역

▢ 위     치 : 용허리 근린공원내

▢ 규     모 : 폐아스콘 및 폐콘크리트 등 운반․처리

○ 폐콘크리트 : 564톤, 폐아스콘 : 905톤

▢ 용역기간 : '13. 2. 1 ~ '14. 9. 30

▢ 총용역비 : 금37,871,620원

▢ 용 역 사 : ㈜해솔산업개발 대표 유 길 문

3		검토내용

▢ 폐기물처리용역 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
폐기물처리용역 준공기한	'13. 2. 1 ~ '14. 9. 30	'13. 2. 1 ~ '14. 11. 30	증)61일 연장

▢ 준공기한 연기사유

○「용허리공원 빗물저류조 설치공사」에서 발생되는 폐기물처리용역으로 본 공사 준공기한 연기('14.11.30)에 따라 폐기물처리용역의 준공기한을 연기코자 함.

▢ 귀책사유 및  지체상금 부과 여부

○ 귀책사유 : 도시기반시설본부

○ 지체상금 : 미부과

4		조치의견

▢ 상기 검토내용과 같이 「용허리 빗물저류조 설치공사 폐기물처리용역」의 준공기한을 연기하여      본 공사 시행에 차질이 없도록 조치코자 함

붙임 : 1) 준공기한 연기 조치 의뢰서 1부.

2) 감리단 검토의견서  1부.  끝