문서번호	생태공원과-2200
결재일자	2014.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
서은교		최병언	09/25 차광재
협 조
	주무관			양순옥

『양화한강공원 친수공간 조성공사(1차)』

준공기한 연기에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

한강사업본부

(생태공원과)

『양화한강공원 친수공간 조성공사(1차)』

준공기한 연기에 대한 검토보고

우리 본부에서 시행중인『양화한강공원 친수공간 조성공사(1차)』는 국토관리청 하천점용허가 협의지연 및 공사품질 향상대책으로 계획변경에 따른 공사기간 부족으로 준공기한 연기 검토 보고임

사업개요

공 사 명 : 양화 한강공원 친수공간 조성공사(1차)

공사개요 : 면적 28,000㎡, 연장 0.27㎞

- 물놀이장, 주차장정비, 자연형호안, 산책로포장

- 실개천, 생태습지, 수목·초본류식재 등

공사기간 : 1차 2013.12.27 ~ 2014.10.26.(총차 2013.12.27 ~ 2014.12.26)

도 급 비 : 2,575,760천원

도 급 자 : 태흥개발(주) 대표자 신현종, 정나라건설(주) 대표자 이완규

준공기한 연기

용역기간

- 당  초 : 2013.12.27 ~ 2014.10.26

- 변  경 : 2013.12.27 ~ 2014.12.26

연기사유

- 서울지방국토관리청 하천점용허가 협의지연 및 공사품질 향상대책에 따른 계획변경으로 공사기간 부족

귀책소재 및 지체상금 부과여부

- 귀책소재 : 한강사업본부

- 지체상금 : 미부과

조치의견

위와 같이 준공기한을 연기하여『양화 한강공원 친수공간 조성공사(1차)』추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 준공기한 연기요청 공문서 1부. 끝.