다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	주간업무보고(8주차) - 세외수입 인프라개선 사업

1. 세외수입종합징수시스템 인프라 개선 사업과 관련입니다.

※ 데이터센터 “2014년 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템 보강 사업”과 통합 추진

2. 세외수입종합징수시스템 인프라 개선 분야의 8주차 사업 추진현황을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상기간 : ’14.  9. 15 ~ 9. 19  【총27주차 사업중 8주차】

- 주간보고회 : ‘14. 9. 15(월) 14:00 데이터센터

나. 추진실적

업무분야	주요 추진 사항	진척률	담당 부서
전 체		23.3% (목표:23.4%)
사업관리	• 성능 테스트 최적화 DBA 투입에 따른 사전 문서 처리 ※ 특급 3.5MM 조기(11.1 ⇒ 9.22) 투입 예정	9.3%	데이터 센터
HW, SW 구축	• 세외 AP/DB서버 성능 측정	27.4%	데이터 센터
AP서비스 이관	• AP보완대상 1차 테이블 검토 및 영향도 검토 • 단위 테스트 시나리오 및 케이스 수립 • To-Be환경에서의 소스 영향도 검토 • As-Is 소스 정제 및 정제 소스 확정(및 검토 요청) • To-Be AP 운영서버 파일시스템 구성 협의	24.1%	재정 사업단
연계서비스 테스트(이관)	• 연계 시스템 기술 협의서 작성중 ※연계시스템별 테스트(및 운영)환경 구축을 위한 조사 • 연계시스템 서면 조사중 • 연계 단위 테스트 케이스 및 시나리오 설계 • 대외기관 업무 협의 : 간단e,e호조(안행부,KLID)	20.7%	재정 사업단
시스템성능 최적화 DB이관 및 마이그레이션	• 세외수입 AP1/AP2 Access Log 분석 및 분석 회의 • SQL 튜닝 2차 교육 실시 : 9. 18 • SQL 튜닝 계획 수립 및 튜닝 요청 절차 협의 • 튜닝 계획서 및 튜닝항목 정의 (진행중)	18.5%	재정 사업단

붙 임 : 1. 주간업무보고서(사업8주차) 1부.  끝.

주무관	조수정		세외수입팀장	양주춘		재정사업단장	09/25 백일헌
협조자
시행	세무과-21324	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 9층	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3441	/전송	02-2133-1034	/	jokkokki@seoul.go.kr	/	대시민공개