문서번호	시설과-6648
결재일자	2014.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
이준의	국중연	김소영		09/25 代김소영
협 조

서울역사박물관 종합안내를 위한 양방향 디지털 통합 시스템 구축 준공기한 연장 검토보고서

2014. 9

서울역사박물관

(시 설 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

『서울역사박물관 종합안내를 위한 양방향 디지털 통합 시스템 구축』

준공기한 연장 검토보고서

『박물관 종합안내 양방향 디지털 통합시스템 구축 용역』사업과 관련하여 기증유물전시실 철거, 개편 및 기획전시실 전시폐막기간 도래에 따라 기제작된 동적실사 위치안내 동영상, VR, 비콘, 나레이션 추가등의 콘텐츠의 재제작이 불가피하여 준공기한을 연장함으로써 박물관 내부의 최신정보를 기반으로한 종합안내 통합시스템 사업추진에 만전을 기하고자 함

□ 용역 개요

〇 사업명 : 서울역사박물관 종합안내 양방향 디지털 통합시스템 구축 용역

〇 계약대상자: ㈜UOK

〇 계약금액: 85,500,000원

〇 용역기간: 2014.08.20 ~ 2014.09.30

□ 연장내역

〇 연장기간

구분	변경전	변경후	비고
계약기간	2014.08.20. ~ 2014.09.30	2014.08.20. ~ 2014.10.30	30일 연장

〇 계약금액 : 변경없음

- 귀책소재 : 서울역사박물관(시설과)

- 지체상금 : 미부과

□ 연장사유

〇 박물관 기증유물전시실 1실, 2실 개편일정에 따라 기촬영된 VR 및 비콘

설치위치변경과 모바일콘텐츠 재제작 필요

- 철거: 2014.10.06.

- 개막: 2014.10.28. ~ 2.22

〇 기획전시실 폐막기간 도래에 따른 신규기획전시 앱플랫폼 구축필요

〇 기증유물전시실 및 기획전시실 전시콘텐츠 패널설명 나레이션 제작구축

□ 향후 추진 계획

〇 2014.09.25. ~ 09.30　 계약변경(준공기한 연기)

〇 2014.10.01. ~ 10.28   기증유물전시실 및 기획전시실 콘텐츠 제작 구축

〇 2014.10.30.           준공. 끝.