문서번호	건축부-11576
결재일자	2014.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	문화시설과장	건축부장		시설국장
소영수	정진수	김우성		09/26 이광세
협 조	자원순환과장		최홍식
	폐기물정책팀장		최규동

- 서울 재사용플라자 조성사업 -

설계용역 계약변경 검토보고

2014.  09.

도시기반시설본부

(건   축   부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 ■ 균형인지 ■ 홍보 ■
				취약계층 ■ 성인지■ 장애인 ■ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

서울 재사용플라자 조성사업

설계용역 계약변경 검토보고

서울 재사용플라자 조성사업과 관련 수요자 및 정책회의 의견 수렴 등기본계획 변경으로 기본계획설계 작성대가 실비정산 및 실시설계 기술심의 일정이 촉박하여 지적사항 보완기간 필요로 아래와 같이 설계용역 계약변경에 대한 검토보고.

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 서울 재사용플라자 조성사업 설계용역

○ 위    치 : 서울시 성동구 용답동 250-1 외 4필지

○ 용    도 : 자원순환관련시설(폐기물재활용시설)

○ 건립규모 : 지하2층/지상5층, 연면적 16,529㎡

○ 용역금액 : 1,599,700천원

○ 용역기간 : 2013.04.08 ~ 2014.09.30

○ 설 계 자 : ㈜삼우종합건축사사무소 외1

Ⅱ		추진경위

○ 2012. 08. 30  : 서울 재사용플라자 조성계획 시장방침(기후본)

○ 2013. 04. 08  : 설계용역 착수(~`13.11.04,  210일)

○ 2013. 05. 16  : 시민 청책 토론회

○ 2013.05.24.~31: 예상수요자 의견수렴(설계자와의 열린데이트)

○ 2013. 06. 14  : 서울시 건축정책위원회 자문(2회)

○ 2013. 10. 08  : 기본계획 조정(시장보고 및 외부전문가 자문 등)

~ 2014.04.10

○ 2014. 05. 13  : 기본계획 자문(5인 건축전문가) 2회

○ 2014. 07. 29  : 기본설계 기술심의 완료

○ 2014. 09. 29  : 실시설계 기술심의 예정

Ⅲ		변경내용검토

□ 용역금액 조정

○ 조정사유 : 수요자 의견 수렴, 건축정책위원회 자문 및 시장 보고시 의견을 수렴한 기본계획 도면 5차례 작성

- 의견수렴을 위한 보고시 최소 2 내지 최대 5개의 (안) 작성

○ 조정금액

(단위 : 천원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감
설계용역비	1,599,700	1,900,100	증 300,400

- 금액 산정 근거 : 착수계 제출시 본 사업의 투입인원에 5차례 기본계획 도면(투시도 등) 작성에 소요된 실비

□ 용역기간 조정

○ 조정사유 : 실시설계 기술심의 일정이 촉박하여 심의시 지적사항에 대한 보완 설계기간 필요

- 2014.09.04. 실시설계 기술심의 요청하여 기술심사담당관의 일정에 따라 심의일자 결정됨(2014.09.29.)

○ 조정내용

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감
용역기간	‘13.04.08 ~ ‘14.09.30	‘13.04.08 ~ ‘14.10.15	증 15일

□ 연기사유 귀책소재  :  도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부  :  미부과

□ 처리의견

- 수요자 의견수렴, 정책위원회 자문, 기본계획 보고시 의견을 반영하여 기본계획을 여러차례 변경함에 따른 용역비 증가 및 용역기간 연장 계약변경은 타당하다고 사료되며 상기와 같이 계약변경 시행코자 함

Ⅲ		향후추진계획

○ 2014.10.15 : 설계용역 완료

○ 2014.12.   : 공사착공

○ 2016.12.   : 공사준공

따로붙임 : 설계자 계약변경(용역비 및 기간) 요구 공문서 2부. 끝.