소 장				과 장	09/26 유제천	심사자	김시련	설계자	이정원		설 계	심 사		결 재
											2014년 9월 일	2014년 9월 일
변 경 설 계 서
	공 사 명 : 수락고가교외 1개소 보수보강공사 폐기물처리용역 설계변경(정산)
	구 분					금 액							비 고
	총 공 사 비					58,784,000원				29,521,800원
	공사비		공 급 가 액			53,440,000원				26,838,000원
			부 가 가 치 세			5,344,000원				2,683,800원
			계			58,784,000원				29,521,800원
공사(용역)개요 : 폐콘크리트 1,000ton → 1,037ton, 폐아스콘(무대) 400ton → 1,040ton 혼합건설폐기물 800ton → 0ton