투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	도로점용(굴착·복구)허가 기간 연장 협조 요청

1. 우이(공사) 제2014-810(2014.9.26.)호와 관련입니다.

2. 우리시에서 민간투자사업으로 시행중인 우이~신설 도시철도 민간투자사업(4공구)과 관련하여 사업시행자로부터 아래와 같이 도로점용(굴착·복구)허가 기간 연장 요청사항이 있어 붙임문서와 같이 통보하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 우이~신설 도시철도 민간투자사업(4공구)

나. 연장사유 : 서울시와 사업시행자 상호합의에 따른 공기연장(26.5개월)

다. 기간연장 요청 내용

구 분	점용장소	점용면적(㎡)	허가기간		비 고
			당 초	변 경
동대문구	신설동 81-42번지 일대	5,825	2010.02.04. ~ 2014.09.14	2010.02.04. ~ 2016.11.30
성북구	동소문동6가 133-1 일대	537.4	2011.07.01. ~ 2014.08.31	2011.07.01. ~ 2016.11.30
	동선동1가 101-3 일대	12,327	2010.02.16. ~ 2014.09.14	2010.02.16. ~ 2016.11.30
종로구	숭인동 1451 번지 일대	165	2010.02.16. ~ 2014.09.14	2010.02.16. ~ 2016.11.30

따로붙임 : 1. 사업시행자 요청 관련 공문 1부.

2. 도로점용허가 기간 연장 신청서 각 1부.

3. 도로점용(굴착·복구)허가 연장 신청서 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	종로구청장(도로과장),동대문구청장(토목과장),성북구청장(도로시설과장)
주무관	윤태권		경전철1과장	박동룡		도시철도사업부장	09/26 한동근
협조자	주무관	안규홍
시행	도시철도사업부-6020	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동 산5-85) 남산별관	/
전화	02-772-7181	/전송	02-772-7305	/	yuntk@seoul.go.kr	/	대시민공개