문서번호	교량보수과-6727
결재일자	2014.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	북부도로사업소장
이정원		유제천	09/26 이승진
협조

수락고가교외 1개소 보수보강공사 폐기물처리용역 정산 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 09

북부도로사업소

(교량보수과)

수락고가교외 1개소 보수보강공사

폐기물처리용역 정산 보고

1. 용 역 현 황

가. 용 역 명 : 수락고가교외 1개소 보수보강공사 폐기물처리용역

나. 용역기간 : 2013년 12월 31일 ~ 2014년 9월 30일

다. 도 급 액 : 58,784,,000원

라. 용역개요 : 폐콘크리트 1,000톤, 혼합폐기물 800톤, 폐아스콘 400톤

마. 도 급 자 : (주)디엘이엔에스 대표 한성섭

삼환환경(주)     대표 강재성

2. 보고내용

가. 정산(변경) 사유

- 공사물량 변경에 따른 폐기물 처리물량 증,감(변경)

· 관련근거 : 송장 별도 첨부

나. 물량 증,감 사항

- 폐콘크리트    : 1,000ton → 1,037ton (증  37ton)

- 폐아스콘(무대) :  400ton → 1,040ton (증 640ton)

- 혼합건설폐기물 :  800ton →      0ton (감 800ton)

다. 용역비 증,감 내역

구 분	금 액(원)
	당 초	변 경	증 · 감	비 고
폐기물처리용역비	58,784,000	29,521,800	감)29,262,200

3. 조치의견

상기 공사물량 변경에 따른 폐기물 처리물량 증,감 사항에 대하여 설계     정산(변경) 처리코자 합니다.

붙임  1. 설계변경설계서 1부.

2. 폐기물 송장 사본 1부(별도 첨부). 끝.