함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	내역변경(정산)시행 (청사 LED 조명설비 교체공사)

1. 행정지원과-22206(2014.08.29.)호와 관련입니다

2. 우리 사업소에서 시행중인 『청사 LED 조명설비 교체공사』에 대하여 건강보험료 및 국민연금 증,감등이 발생함에 따라 다음과 같이 내역변경(정산)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 청사 LED 조명설비 교체공사

나. 계약금액 : 금9,720,000원(금구백칠십이만원)

다. 계 약 자 : ********* ******

라. 공사기간 : 2014.08.28. ~ 2014.09.26

마. 변경내용 : 정산 내역변경

- 변경금액 : 변경전 9,720,000원 → 변경후 9,310,000원

(감 410,000원)

- 공사기간 : 변경없음

바. 변경사유 : 공사기간이 30일 미만에 의한 건강,연금 미사용으로 제경비     등을 정산 반영함

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비,시설장비유지비

붙임 : 1. 준공정산 내역서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

주무관	서영식		행정관리팀장	김형국		행정지원과장	유철민		남부수도사업소장	09/26 전영석
협조자	주무관	이은옥		주무관	정은희
시행	행정지원과-24583	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97(신대방동)	/	arisu.seoul.go.kr
전화	3146-4415	/전송	3146-4479	/		/	부분공개