문서번호	산지방재과-9451
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		사면정비팀장	산지방재과장
문동일		정상모	09/29 정중곤
협조	주무관		유진석
	주무관		김계영

우면산 산사태 복구공사 하자조사 계획

푸른도시국

(산지방재과)

우면산 산사태 복구공사 하자조사 계획

우면산 산사태 복구공사(1~3공구)에 대한 2014 하반기 하자조사를 실시하고 시공사에 하자 발생사항을 통보ㆍ조치코자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 우면산 산사태 복구공사(1~3공구)

○ 공사기간 : 2011.12.22 ~ 2012.12.14

○ 사업내역

구분	위 치	규 모	공사비 (단위:천원)	시공사
계		38.9ha	19,468,615	산림조합중앙회
1공구	래미안, 임광아파트 앞, 전원마을	17.1ha	8,514,105	동부산림경영센터 (강릉)
2공구	신동아아파트 앞, 보덕사	13.8ha	7,509,032	북부산림경영센터 (홍천)
3공구	생태연못, 형촌마을	8ha	3,445,478	남부산림경영센터 (안동)

○ 감 리 사 : 숲산사산림기술사사무소

○ 설 계 사 : 산림조합중앙회 엔지니어링사업본부

○ 하자기간 : 준공검사일로부터 공종별 2~7년

공 종 별	하자보증년수
	1공구 (2012.12.14 준공)	2공구 (2012.10.24 준공)	3공구 (2012.10.31 준공)
Con'c사방댐, 역T형, 중력식	'12.12.28~'19.12.27(7년)	'12.10.24~'17.10.23(5년)	'12.11.01~'19.10.31(7년)
구조물공	'12.12.28~'17.12.27(5년)	'12.10.24~'17.10.23(5년)	'12.11.01~'17.10.31(5년)
조 경 공	'12.12.28~'14.12.27(2년)	'12.10.24~'14.10.23(2년)	'12.11.01~'14.10.31(2년)

□ 하자조사계획

○ 조사기간 : 2014. 9. 29 ~ 10. 10

○ 조사내용 : 공종별 하자수량 및 내용 현장점검

- 고사된 수목 제거 및 보식, 파종 및 새심기 보완

- 구조물의 기능성, 주변부 세굴가능성, 마감부 및 이음새 등 하자여부

○ 조사방법 : 공구별 담당자가 시행

공구별	1공구	2공구	3공구
담당자	시설6 유진석	녹지7 김계영	녹지7 문동일

○ 추진일정

- ‘14.09.29 ~ 10.10 : 공구별 담당자 하자조사

- ‘14.10.13 ~ 10.17 : 하자통보 및 착수

- ‘14.10.20 ~ 10.31 : 하자조치 및 준공.

□ 행정사항

○ 조경공사는 금년 하반기에 하자담보 책임기간(2년) 만료

- 동절기인 2014.12.27.에 하자담보 책임기간이 만료되는 1공구(조경공)에

대하여도 식재적기인 금번 가을철 하자검사 및 준공(조경분야)으로 갈음.

○ 공구별 담당자가 하자시설 및 수목 등에 대하여 시공사에 통보 및 조치.

끝.