투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	수락고가교외 1개소 보수보강공사 설계변경(제2회) 시행

우리사업소에서 공사시행 중에 있는 『수락고가교외 1개소 보수보강공사』에 대한 설계변경(제2회)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 설계변경 내역

- 공 사 명 : 수락고가교외 1개소 보수보강공사

- 공사기간 : 2013.10.23. ~ 2014.09.30

- 도 급 자 : ㈜극동에버텍 대표이사 유성윤외 1

- 변경사유 : 물량 증,감, 관급자재비, 이전비 등 감소

- 변경내역(2회)                                            (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감
총공사비	2,683,491,000	2,542,060,210	감) 141,430,790
도 급 비	2,461,360,000	2,429,900,000	감) 31,460,000
관 급 비	79,614,200	43,970,410	감) 35,643,790
이 전 비	142,516,800	68,189,800	감) 74,327,000

나. 예산과목 :

- 도시안전실도로시설과,도로시설관리,자동차전용도로 고가차도 및 입체교차로 관리,수락고가 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

- 도시안전실도로시설과,도로시설관리,도로시설물 운영,도로시설물 일상유지보수공사, 시설비

별  첨 : 1) 설계변경 내역서(제2회) 1부.

2) 실정보고사항 검토보고서 1부. 끝.

주무관	이정원		교량보수과장	유제천		북부도로사업소장	09/29 이승진
협조자	계약1팀장	김점선
시행	교량보수과-6733	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 (번동 365-1) 북부도로사업소	/
전화	02) 944-5493	/전송	02) 945-5013	/	dlwjddnjs.seoul.go.kr	/	대시민공개