문서번호	설비부-10639
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
조기성	이흥복	09/29 代권오식

『중동빗물펌프장 외 2개소 기계공사』 공사기간 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  9.

도시기반시설본부

설비부

『중동빗물펌프장 외 2개소 기계공사』

공사기간 연기 검토 보고

「중동빗물펌프장 외 2개소 기계공사」와 관련하여 선행공정(토목․건축) 지연에 따른 공사기간 연기를 아래와 같이 검토 보고 드림

Ⅰ				공사개요

◦ 공 사 명 : 중동빗물펌프장 외 2개소 기계공사

◦ 공사규모

- 중  동 : 펌프 260kW 외 1대 증설

- 합  정 : 펌프 270kW 외 4대 증설 및 교체

- 용두 3 : 펌프 120kW 외 2대 신설

◦ 공사기간 : ’13. 05. 01 ~ ’14. 09. 30

◦ 공사비(1차) : 165,377,673원(총차 241,938,080원)

◦ 시 공 사 : 이엔디엔지니어링(주) / 감독위탁 : 서울시 시설관리공단

Ⅱ				관련근거

◦ 공사감독3처-9082(’14.09.26) : 준공기한 연기검토보고서 제출

Ⅲ

	공사기간 연기

◦ 연기사유 : 선행공종(토목,건축) 지연에 따른 기계설비공사 공사기간 연기

◦ 공사기간 연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	2013. 05. 01 ~ 2014. 09. 30	2013. 05. 01. ~ 2016. 05. 30	+608일
1 차	2013. 05. 01 ~ 2014. 09. 30	2013. 05. 01. ~ 2015. 04. 30	+212일

※ 공사금액 변경 없음

◦ 귀책소재 : 도시기반시설본부

◦ 지체상금 부과여부 : 미부과

◦ 감리의견 : 선행공종(토목,건축) 지연에 따른 후속 공종인 기계공사 기간

연기 필요

Ⅳ				보고자 의견

◦ 감리 검토의견이 타당하므로 공사기간을 연기하고 향후 공사 공정관리에

만전을 기하고자 함

따로붙임  1. 공사감독 공사기간 연기검토 보고서  1부.

2. 변경 공사예정공정표 1부.     끝.