	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 시행(서울재사용 플라자 조성 설계용역)

1. 우리본부에서 시행중인 서울재사용 플라자 조성 설계용역에 대하여 아래와 같이 용역기간 및 용역비 변경계약 시행코자 합니다.

가.  계약건명 : 서울재사용 플라자 조성 설계용역

나. 계 약 자 : ㈜삼우종합건축사 사무소 외1

나. 변경사항 : 용역기간 및 용역비

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	’13.04.08∼’14.09.30	’13.04.08∼’14.10.15	증 15일
용 역 비	1,599,700,000원	1,900,100,000원	증 300,400,000원

붙 임 : 변경방침서 1부.  끝.

주무관	소영수		문화시설과장	정진수		건축부장	09/29 김우성
협조자	경리과장	허금도
시행	건축부-11616	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2629	/전송	02-3708-2659	/	ysso0912@seoul.go.kr	/	대시민공개