문서번호	기술심사담당관-15277
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술관리팀장	기술심사담당관
강명석		代강명석	09/29 최진선
협 조
	설비심사팀장			代임현근
	건축심사팀장			차재옥
	심사총괄팀장			이철

지하철9호선 2단계 개통대비 종합점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

기술심사담당관

지하철9호선 2단계 개통대비 종합점검계획

2015.3월 개통 목표로 추진중인 “9호선 2단계 건설사업” 에 대한 종합점검(토목, 건축, 시스템 등)을 실시하여 개통에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 구    간 : 신논현 ~ 종합운동장(915~917공구)

□ 연    장 : 4.5㎞, 정거장 5개소 (환승역 2)

□ 사 업 비 : 4,829억원

□ 사업기간 : 2008. 6 ~ 2014. 12

□ 공 정 률 : 93%

※ 개통 예정 : 2015. 3월

Ⅱ		종합점검 계획

□ 점검 기본방향

안전한

지하철 개통

외부전문가

기술심사담당관

외부전문가 합동으로 점검내실화

잔여공사 공정계획 확인

개통대비 시민불편사항 해소

□ 점검 기간 :‘14. 9. 30(화) ~‘14. 10. 7(화) (기간중 5일간)

□ 점검 대상

❍ 9호선 2단계 3개 공구

구 분	915공구	916공구	917공구
공사개요	연장 1,770m, 정거장 2개소	연장 1,140m, 정거장 2개소	연장 1,590m, 정거장 1개소
공정률	93.9%	92.4%	95.1%
시공사	경남기업	현대산업개발	GS건설
감리사	동일기술공사	유신	선진엔지니어링
관련부서	도시철도토목부 (9호선3과)	도시철도토목부 (9호선2과)	도시철도토목부 (9호선1과)

□ 점검반 운영

1. 점검반 구성 및 편성

❍ 전문가 구성 : 건설기술심의 위원 중심으로 지하철 건설과 관련된 경험있는 외부전문가로 구성

❍ 점검반 편성 : 2개 분야 12명

	합 동 검 검 반(12명)
토목·건축분야(6명)						시스템분야(6명)
점검분야		토목, 건축				점검분야		전기, 전차선, 기계설비, 신호·통신, 차량 등
외부전문가		2명				외부전문가		3명
주관팀		기술관리팀 (팀장 1, 직원 3)				주관팀		설비심사팀 (팀장 1, 직원 2)

❍ 점검반 명단

연번	분 야	외부전문가		기술심사담당관
		성 명	소 속(직위)
1	토 목	정동순	대진컨설턴트(부회장)	조현석팀장, 강명석, 장현철, 최장길
2	건 축	백낙민	경복개발(본부장)
3	플랜트설비	박영수	메트로텍(대표)	김태기팀장, 정경수, 임태수
4	전 기	신인석	세종기술(부사장)
5		이재석	동산엔지니어링(부사장)

2. 점검반 운영방안

❍ 점검방법 : 공정계획 검토 및 현장점검 병행 시행

❍ 주요 점검내용

- ‘14. 12월 목표 분야별 공종 완료 가능여부

- 잔여 공정 마무리 계획 및 부진 공종 만회 대책

- 개통대비 시운전 계획 등 시스템 분야 진행사항

- 지하철 운영 기관 등(도시교통본부, 서울메트로, 9호선 메트로) 상호 협력 사항 등 점검

〔 토목, 건축 〕

- 정거장 본체구조물 시공 상태

- 지상부 도로복구 상태 및 향후계획

- 정거장 출입구, 케노피 및 환기구 시공 상태

- 정거장 천정, 벽체판넬, 바닥판석 내장공사 시공상태 등

〔 전기, 기계설비, 신호·통신, 시운전 등 〕

- 개통 일정에 따른 장비 시운전 등 적정 추진 여부

- 변압기, 수배전반, 접지 등 각종 설비의 적정 설치 여부

- 역무자동화 설비 등 적정 설치 여부

- 정거장 수배전만 설치, 전기실 수전, 사용전 검사 등

- 신호분야 시험, 시운전 결과 장애발생 여부

- AFC설비, 환승연계, 신호시스템 구축 실태 등

3. 점검결과 조치

❍ 지적사항은 사업부서에 통보하여 즉시 시정토록 조치

- 신속한 조치를 위하여 지적사항을 점검현장(책임기술자)에 우선 전달

❍ 지적사항 조치 후 기술심사담당관에게 결과 통보(발주부서)

- 단순사항 : 즉시 시정조치하고 그 결과를 전‧후 사진 첨부 제출

- 주요 지적사항 : 부서장 책임하에 보완시공 등 특별관리대책 수립 시행

Ⅲ		행 정 사 항

□ 외부 점검위원(5명) 수당 지급

❍ 소 요 액 :  1,500천원

- 산출내역 : 150천원/일 × 2일 × 5인 = 1,500천원

❍ 예산과목 : 건설공사 설계수준향상, 건설기술심의회 운영, 일반운영비, 사무관리비

※ 공사장 점검 직원 : 별도의 출장 여비 지급

따로붙임  1. 점검결과 지적사항 양식 1부.

2. 개통대비 분야별 체크리스트 1부.  끝.