문서번호	교량보수과-2917
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	교량보수과장	남부도로사업소장
임동운	이용재	09/29 민승기
협 조

- 동작대교(도로교, 철도교) 정밀안전진단용역 -

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

남부도로사업소

(교량보수과)

- 동작대교(도로교, 철도교) 정밀안전진단용역 -

준공기한 연기 검토 보고

동작대교(도로교, 철도교) 정밀안전진단용역 추진과 관련 자문회의 및 건설기술심의 결과 반영 등에 따른 한국시설안전공단으로부터 용역기한 연기 요청이 있어 검토하고 준공기한을 연기코자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 동작대교(도로교, 철도교) 정밀안전진단 용역

○ 용역기간 : 2013. 10. 4. ~ 2014. 9. 28.

○ 용 역 비 : 763,000,000원

○ 용 역 사 : 한국시설안전공단 대표 장기창

□ 보고내용

○ 근 거 : 한국시설안전공단 시설안전본부-593(2014. 9.26)

○ 준공기한 연기 사유

- 동작대교(도로교,철도교)에 대한 추가조사사항으로 도로교의

열화상 카메라를 이용한 결함 조사, 강재연석부 절취 후 현장조사 및

철도교의 철도차량 운행에 따른 횡방향 진동 ,배수처리, 방호울타리,

결함물량표 재작성 등 추가조사 후

- 우리사업소 자문회의(2014. 8.18)와 서울메트로 자문회의(2014. 9. 4)

개최시 자문위원 의견에 대한 추가조사 및 반영후 건설기술심의가

2014. 9.30일 개최됨에 따라

- 건설기술심의 조치결과 반영 등을 고려하여 내실있는 진단결과

보고서 작성을 위하여 용역기간을 2014. 10.30일까지 연장

○ 준공기한 연기 요청사항

- 당 초 : 2013. 10.  4. ~ 2014.  9. 28.

- 변 경 : 2013. 10.  4. ~ 2014. 10. 30.

□ 조치의견

○ 한국시설안전공단 연기 요청사항에 대하여 검토한 바,

- 우리사업소와 서울메트로에서 한국시설안전공단에 자문회의시

지적사항에 대한 추가조사 및 서울시 건설기술심의후 조치결과 반영에 따른 공기 연장이 필요할 것으로 사료되어

- 내실있는 과업을 위하여 용역기간을 2014. 10.30일까지 준공기한을 연기하고자 합니다.

□ 행정사항

○ 준공기한 연기의뢰 ⇒ 관리단속과

- 준공기한 연기내용

∙ 당 초 : 2013. 10.  4. ~ 2014. 09. 28.

∙ 변 경 : 2013. 10.  4. ~ 2014. 10. 30.

○ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 준공기한 연기요청 관련 서류 1부.  끝.