문서번호	기전과-6821
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
차준원	채희준	09/29 최주용

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

변경 승인 요청에 따른 검토 보고 - 답십리16구역

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 09

성동도로사업소

(기 전 과)

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

변경승인에 따른 검토 보고

교통안전시설물 원인자 부담공사 변경승인 요청이 있어 관련서류 및 현장 확인후 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

삼성물산(주) 답십리16 제2014-09-11호(2014.09.29.)

㈜영호이앤씨 영원 14-09-10호(2014.09.22.)

�

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 교통안전시설물 설치공사(답십리16구역)

공사구간 : 동대문구 답십리16구역 주변

공사기간

구분	변경 전	변경 후	변경사유
신호	2014.08.20.~2014.09.30	2014.08.20.~2014.10.30	토목공사 지연으로 인한 공기 연장신청
표지	2014.09.05.~2014.09.30	2014.09.05.~2014.10.30

공사참여자

구분	공사참여자			원인자
	시공사	감리사	설계사
신호	미래월드안전(주)	서울시 강북감리 (교통운영과)	㈜건영이앤씨	삼성물산(주)

Ⅲ		변경요청 및 실정보고 검토결과

위치(교차로명)	현황 및 문제점	변경요청의견	검토경과
한전간판	부착대가 짧아 시인성문제가 있다는 민원	부착대 변경	현장 검토 결과 기존 7m 부착대를 9m 부착대 설치로 변경을 승인함이 타당함
한전간판(연동)	지중 암반으로 인하여 지중화공사 미시공	암반으로 인한 공사 변경 요청	현장 검토 결과 아스팔트 횡단굴착 구간이 암반지대 이므로 가공선으로 변경 승인함이 타당함
	공사구간 사유지	공사구간내에 사유지가 포함됨	현장 검토 결과 사유지에 시설물 설치가 불가하여 차량지주에 보행등을 통합설치 승인함이 타당함
	제어기 위치 조정	암반으로 인한 위치 변경 요청	현장 검토결과 암반지대에 제어기 설치가 불가능하여 위치 조정하여 설치를 승인함이 타당함

붙    임 : 1. 원인자부담공사 준공 변경승인 요청 및 실정보고 1부. 끝.