함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	현장실정보고 검토결과 통보

1. 공사감독2처-15851(2014.09.24.)호와 관련입니다

2. 위호와 관련 귀 공단에서 위탁감독중인 “삼각지역~한강대교북단 송배수관정비공사”에 대한 현장실정 보고서를 검토하고 그결과를 아래와 같이 통보하오니 공사시행에 차질이 없도록 만전을 기하시기 바랍니다.

- 보고내용 및 검토의견

구 간	서울특별시시설관리공단 보고내용 및 조치의견	사업소 검토의견
1~6 구간	페기물 처리 방법에 대한 방안 검토 - 당초설계 건설폐기물(폐아스콘) 처리 무대로 설계 - 문 제 점 1) 공사 현장에서 발생한 페아스콘에 골재층이 붙어있어 재활용업체 반입 거부 2) 집하장 장소 협소로 장기간 페기물 보관은 불가함 - 대 안 (1안) 공사업체가 분리 작업후 무대 처리 방법 문제점 : 작업능률저하 및 소음 및 분진으로 인한 민원발생 우려 분리비용발생 : ********** (2안) 페기물처리 용역업체에 분리 위탁 문제점 : 분리대상 기준 모호성과 분리비용결정 적정성, 분리시행여부 확인 불가 분리비용은 별도 협의 필요(신규공종 발생) (3안) 양호한 폐아스콘은 당초안 대로 무대처리 혼합페기물은 중간처리업체에 유대 처리 - 검 토 안 3안으로 시행 폐기물 야간 처리시 소운반 및 상차비 제외 폐기물 처리비 증가	3안으로 결정 - 본 공사의 폐아스콘 유,무대 처리결정은 현장에서 감독이 확인 후 결정하여 반입 조치하여야 하며, - 반입시 폐기물에 대하여는 사진촬영 등근거자료를 비치하고 폐기물처리업체와 수시로 확인하여 양호한 폐아스콘이 유상 처리되는 일이 없도록 관리 감독을 철저히 하시기 바람. - 본 공사에서 발생된 폐아스콘 유대처리 비용 정산시, 귀 공단에서 확인 검토된 자료를 제출하여 정확한 폐기물 정산이 될 수 있도록 만전을 기해 주시기 바랍니다.

- 끝 -

	중부수도사업소장
주무관	김선호		급수설비팀장	이병운		급수운영과장	전결 09/29 代이병운
협조자
시행	급수운영과-19816	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2145	/전송	3146-2189	/	k*********@seoul.go.kr	/	부분공개(7)