문서번호	급수운영과-19809
결재일자	2014.9.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
김선호	이병운	09/29 代이병운

공사실정보고에 의한 사업소 검토의견

2014. 9

중부수도사업소

1. 제    목 : 공사실정보고에 의한 사업소 검토의견

2. 관련근거

가. 공사감독2처-15851(2014.09.24)호

3. 공사현황

가. 공 사 명 : 삼각지역 ~ 한강대교북단 송배수관 정비공사

나. 공사개요 : D=100~600㎜, L= 1,752m

다. 공사기간 : 2014. 06. 12 〜 2014. 12. 12

라. 계약금액 : ************

마. 계약상대자 : ****************

바. 감 독 자 : 서울시시설관리공단  임호인

4. 보고내용 및 검토의견

구 간	서울특별시시설관리공단 보고내용 및 조치의견	사업소 검토의견
1~6 구간	〇 페기물 처리 방법에 대한 방안 검토 - 당초설계 건설폐기물(폐아스콘) 처리 무대로 설계 - 문 제 점 1) 공사 현장에서 발생한 페아스콘에 골재층이 붙어있어 재활용업체 반입 거부 2) 집하장 장소 협소로 장기간 페기물 보관은 불가함 - 대 안 (1안) 공사업체가 분리 작업후 무대 처리 방법 ⋅ 문제점 : 작업능률저하 및 소음 및 분진으로 인한 민원발생 우려 ⋅ 분리비용발생 : ********** (2안) 페기물처리 용역업체에 분리 위탁 ⋅ 문제점 : 분리대상 기준 모호성과 분리비용결정 적정성, 분리시행여부 확인 불가 ⋅ 분리비용은 별도 협의 필요(신규공종 발생) (3안) 양호한 폐아스콘은 당초안 대로 무대처리 혼합페기물은 중간처리업체에 유대 처리 ⋅ 문제점 : 유,무대 처리 확인 곤란 정산시 페기물처리 담당자 확인 필요 - 검 토 안 ⋅ 3안으로 시행 폐기물 야간 처리시 소운반 및 상차비 제외 폐기물 처리비 증가	〇 3안으로 결정 - 현장에서 발생한 폐기물처리에 대한 관리 감독은 서울시시설관리공단에서 시행하여 야 함 - 폐아스콘 유,무대 처리결정은 현장에서 감독이 확인후 결정하여 반입 조치하여야 하며 - 반입시 폐기물에 대하여 사진촬영 등 근거자료를 비치하고 폐기물처리업체와 수시로 확인하여 양호한 페아스콘이 유상 처리되는 일이 없도록 관리 감독을 철저히 하도록 지시코자 함 - 또한 계약된 폐기물 운반업체인 삼흥도 시개발(주)에도 유상 처리시 폐아스콘 상태를 확인할 수 있도록 사진 촬영등 관련자료를 비치토록 조치하고 - 폐아스콘 유대처리 비용은 폐기물 처리용역 설계 변경시 처리 현황을 관리⋅감독업체인 시설관리공단과 검토후 증액사항에 대하여 반영코자 함

5. 조치의견

상기 검토의견에 대하여 감독업무를 수행하고 있는 서울특별시시설관리공단 및 폐기물운반업체인 삼흥도시개발(주)에 통보하여 폐기물처리가 원할이 되도록 조치코자 합니다.

별  첨 : 관련현황 각 1부. 끝.