문서번호	방재시설부-9514
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
한종수		김흥근	09/29 임춘근
협조
	주무관		이병환

「용허리공원 빗물저류조 설치공사」

감리원(책임감리,토목보조) 투입기간 연장 검토 보고

2014. 9

서울특별시도시기반시설본부

(방재시설부)

『용허리공원 빗물저류조 설치공사 』

감리원(책임감리,토목보조) 투입기간 연장 검토 보고

‘용허리공원 빗물저류조 설치공사’ 시행 중 폐기물 처리 및 준공도서 작성, 시설물 인계를 위한 감리원의 지속적인 투입이 필요한 실정으로 감리원(책임감리,토목보조) 투입기간 연장에 대하여 검토 보고 드림

1		관련근거

❍ 잠원2감 2014-244호(2014.9.29) : 공사기간 연장에 따른 감리원 연장투입 계획 보고

2		공사개요

❍ 공 사 명 : 용허리공원 빗물저류조 설치공사

- 용 역 명 : 잠원2 빗물펌프장 신설공사 외 1개소 전면책임감리용역

❍ 공사규모 : 빗물저류조 V=15,000㎥, 유입관로 L=220m(2.0×1.5@1)

❍ 공사기간 : 2012. 12. 20 ~ 2014. 11. 30

❍ 총사업비 : 금11,000백만원

❍ 시공사/감리사 : 케이월드종합건설(주) / (주) 신명건설기술공사

3		현안 문제 검토

❍ 공원조성 구간내 지정폐기물(유류탱크) 발견되어 공사기간 연장 불가피

- 저류조(V=15,000㎥) 및 유입관로(L=220m) 등 토목공사 완료(공정율 99%)되었으나,

지정폐기물 처리(약60일 소요)기간 공사기간 연장 필요

❍ 공사기간 연장에 따른 감리원(책임감리, 토목보조) 추가 투입 요인 발생

- 지정폐기물 처리 및 준공 서류 작성 등 토목감리 추가 수요 요인 발생

4		감리단 의견

❍ 2014년 수방대비를 위해 열악한 환경에서 공사가 진행되어 왔고

❍ 폐기물 처리 및 시설물 인계, 준공서류 작성을 위한 감리원(책임감리, 토목보조) 연장 투입이 필요한 실정으로,

❍ 본 공사의 감리용역인 “잠원2 빗물펌프장 신설공사 외 1개소 전면책임감리용역”의 설계변경 시 추가 투입에 따른 용역비를 반영.

- 감리기간 : 당초 ′13.4.1~′14.9.30 → 변경 ′13.4.1~′14.11.30(증61일)

- 소요예산 : 55,548천원

5		조치계획

❍ 책임감리원의 의견과 같이 폐기물 처리 및 시설물 인계, 준공도서 작성을 위한 감리원이 필요하므로 감리원(책임감리, 토목보조) 투입을 61일간 연장하고 증가되는 감리비(55,548천원)는 본공사의 감리용역인  “잠원2 빗물 펌프장 신설공사 외 1개소 전면책임감리용역”의 설계변경 시  반영코자 함.

붙임 : 책임감리원 검토의견서 1부.   끝