다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	기술용역 준공기한 연기 계약변경 의뢰(강남)

1. 우리과에서 시행하고 있는 “교통 소통개선 및 횡단보도 확충사업 설계(강남)”와 관련입니다.

2. 위 용역과 관련 준공기한을 연기코자 아래와 같이 계약변경을 요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 교통소통개선 및 횡단보도 확충사업 설계용역(강남)

나. 용 역 사 : ㈜도화엔지니어링

다. 용역기간 : 13.3.12 ~ 14.09.30

라.  용 역 비 : 169,790천원(변동없음)

마. 예산과목 : 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계및소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 도로교통소통개선, 시설비

바. 준공기한 연기요청내용

구 분	도급금액 (천원)	준 공 기 한		비 고
		당 초	변 경
전체	169,790,000	2014.09.30	2014.11.28	증59일

사. 귀책소재 : 서울시

아. 지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 : 1. 준공기한연기보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	교통운영과장
주무관	송시영		교통개선팀장	유승효		교통운영과장	09/29 강진동
협조자
시행	교통운영과-18072	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 서소문시청별관	/
전화	02-2133-2467	/전송	02-2133-1053	/	ssyw@seoul.go.kr	/	대시민공개