문서번호	토목부-18727
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		최광무	09/29 노우성
협조

실시공 물량으로 정산 보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

실시공 물량으로 정산 보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

향후 유지관리하여야 할 관할구청의 의견에 따라 강일삼거리 우수암거를 시공하고 실시공 물량으로 정산하고자 이에 대한 검토 보고 임

■ 공사개요

◦ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

◦ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

◦ 공사기간 : 2012. 8. 2. ～ 2014.12.31.

◦ 도 급 비 : 18,161백만원

◦ 시 공 사 : ㈜신성건설외 2개사

◦ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

■ 현 황

◦ 강일삼거리 우수암거 시공 중 강동구청 요구사항 및 현장 여건에 맞게 시공 수량 증감이 있는 상태임

■ 변경검토내용

공 종	단위	수량			사 유
		당초	변경	증감
① 사토적치,운반	㎥	0	3,242	3,242	•도심지구간 사토적재 불가로 본선적치 및 운반
② PC암거	m	316	327	11	• 고덕천 연결부 우수단면 협소 설계 ∅1200 → PC암거 L=9m (관할구청 협의) • 선사로 접속부 임시맨홀 철거 후 암거연결 (선사로요구) L=2m
③ 맨 홀 장비투입구	개소	5	8	3	• 장비투입구 1개소, 맨홀 2개소(고덕천연결부) 관할구청 요구 및 협의
④ 우수받이	개소	9	11	2	• 노면배수 처리시설 추가
⑤ U형 PC측구. 흄관	식	1	1	-	• 기존횡단 빗물받이 복구 • 고덕천 연결흄관(∅1200) 삭제

■ 감리단 검토의견

◦ 강일삼거리 우수암거 매설과 관련 관할구청의 요구사항 및 현장실정에 따라 시공 후 정산한 사항을 추후 설계변경시 반영함이 타당하다고 사료됨

■ 조치 계획

◦ 상기 감리단 검토의견과 같이 승인하여 공사 시행함이 타당하다고 사료되며 추후 설계 변경시 반영함이 타당함.

- 개략공사비 : 증)29백만원

붙  임 : 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.