문서번호	토목부-18724
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목부장	시설국장
최진우		노우성	09/29 이광세
협조
	토목총괄과장		김영수

공정회의 결과 보고

《 월드컵대교 건설공사 》

2014. 9.

도시기반시설본부

토    목    부

공정회의 결과 보고

《 월드컵대교 건설공사 》

우리본부에서 추진중인 월드컵대교 건설공사와 관련하여 유관기관 등과

소통을 강화하고 사업을 원활히 추진하기 위하여 공정관리 회의를

개최하고 그 결과에 대한 보고임

관련근거

◦ 시장 요청사항 (2014. 8.19), 건설총괄부-16027(2014. 9. 1.)

공사현황

◦ 공사규모 : 폭 31.4m(6차로), 연장 1,980m

◦ 공사기간 : 2010. 3.22. ~ 2015. 8.22.

◦ 공 사 비 : 176,063백만원

◦ 시공사 및 감리단 : 삼성물산(주) 외 2개사, (주)포스코엔지니어링 외 1개사

공정회의개요

◦ 일  시 : 2014. 9.25. (목) 15:00 ~

◦ 장  소 : 월드컵대교 현장사무실

◦ 참석자

- 도시기반시설본부 : 토목부장, 토목총괄과장, 공사관리관

- 도시안전실 : 도로계획과 도로시설계획팀장 외 1

- 마포구청 : 토목과장

- 영등포구청 : 푸른도시과장 외 1, 도로과 도로계획팀장

- 현 장 : 책임감리원, 현장소장

회의결과

◦ 예산 미확보로 준공기한이 ‘15년에서 ’19년 연기가 불가피하며 ‘19년까지 연기시 내년부터 매년 400억 예산이 필요함으로 사업주관부서인 도로계획과에서 예산이 확보될 수 있도록 협조 요청

- 부족예산은 SH 광역도로 분담금으로 확보하는 방안 검토 요청

◦ 마포구청 요구사항

- 북단 B램프 산책길 주변 방음벽 설치 : H=5.5m, L=1000m, 13억

․ 방음벽을 설치해도 강변북로 소음 감소효과 없을 것으로 판단되며 B램프와 산책길(메타세콰이어길)과 10m 여유폭이 있으므로 방음림을 설치하는 방안 검토

- 증산로 보도 포장 : B=4.5m, L=700m, 3억

․ ‘02년도에 설치한 보도로서 현장조사 결과 투수콘 파손으로 매우 불량한 실정으로 시급히 보도포장이 필요하나 ‘19년도에 교량 공사가 완료되므로 준공시기인 ’19년도에 예산확보여부등 공사가능 여부 검토

◦ 영등포구청 요구사항

- 안양천에서 양화폭포근린공원 및 쥐산으로 직접 접근이 가능한 보행육교 설치 요청

․ 기존 영등포정수장에 전망대가 있으며 공사비가 과다하게 소요(25억)되어 설치가 어려운 실정으로 보행육교 대신에 기존 지하차도 보도확장등 여러가지 방안을 검토하여 영등포구청과 재협의

- 남단IC 휴게시설(음식점) 철거

․ 영등포구청에서 세입자가 완전 이주될 수 있도록 조치후 건물 철거

- 양화 인공폭포 시공

․ 인공폭포 착공 시기인 ‘17년도에 영등포구청과 재협의하여 가능한 설계에 적극 반영하겠음

행정사항

◦ 본 사업은 예산 미확보로 공정이 부진하나 준공기한을 ‘15년에서 ’19년으로 연기시 공정부진이 해소됨으로 공정관리 대상 공사장에서 제외

붙  임 : 사진 및 관련자료 1부.  끝.