문서번호	도로계획과-12454
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	간선도로계획팀장	도로계획과장	시설안전정책관		도시안전실장
신대식	김기용	형태경	한제현		09/29 조성일
협 조

올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설

사업시행 협약서 체결계획 보고

2014.  9.

도시안전실

(도로계획과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 ■	(	롯데물산(주)외 2개사	)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 ■ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설사업

사업시행 협약서 체결계획 보고

제2롯데월드 건축허가 조건인 올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설사업 (1단계 구간)의 원활한 추진을 위하여 서울시와 롯데간 사업시행 협약서 체결계획 보고임.

□ 사업개요

○ 위    치 : 송파구 잠실주공5단지 후면 한가람로 ~ 아산병원길

○ 규    모 : 도로개설 폭 2~4차로, 연장 1.83km

- 1 단계 : 잠실주공5단지 후면 한가람로~잠실나루역 연결 교차로(B=4차로, L=1.12km)

- 2 단계 : 잠실나루역 연결 교차로~아산병원길(B=2차로, L=0.71km)

○ 총사업비 : 1,258억원(1단계 1,108억원, 2단계 150억원)

□ 추진경위

○ '08.10.~'09.01.  : 타당성조사 및 기본계획 시행(송파구)

○ '09.02.        : 투자심사(조건부)

- 제2롯데월드 등 대규모사업으로 인한 교통유발에 따른 민간분담 방안 강구

○ '09.07.~'10.10.  : 기본설계 시행(제일엔지니어링)

○ '10.06.22     : 건축위원회 심의결과(조건부 동의)

- 지하차도(520m)는 롯데에서 도시교통본부와 협의하여 개설

○ '10.12~'12.05. : 실시설계 시행(유신, 천일)

○ '14.07.29     : 사업비 추가부담 및 도로개설 방안 제출요구(시→롯데)

- 전면지하화를 요구하는 장미아파트 민원해결 및 도로개설 방안 제출요구

○ '14.08.22        : 전면지하화를 포함 1단계 구간(1.12km) 개설 수용(롯데→시)

○ '14.08. ~     : 협약서(안) 협의

□ 주요 협약내용

○ 사업의 범위

사 업 명	위 치	사업규모	시행자
올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설사업	잠실주공5단지 후면 한가람로 ∼ 잠실나루역 연결교차로	-실시설계 및 시설공사 : B=4차로, L=1.12km · 1단계 구간(지하차도 770m 포함)	롯데물산(주) 롯데쇼핑(주) (주)롯데호텔

○ 업무 분장

구 분	설계감리	책임감리
시	·감리시행 관련 협의 조정 총괄 ·기성 등 사업비 집행 승인 ·감리 감독	·감리시행 관련 협의 조정 총괄 ·사업비 관리 ·감리 선정, 계약, 감독 등
시행자	·감리업체 선정, 계약, 사업비 부담	·사업비 납부

○ 사업비 부담

- 설계감리비 및 책임감리비는 시행자가 부담

- 시는 사업비를 사업종료 후 90일 이내에 정산하고, 잔액이 발생할 경우 시행자에게 반납하고, 부족한 경우에는 시행자가 증가분을 부담.

○ 사업비 지급시기 및 방법

- 사업비는 협약의 효력 발생 후 30일 이내에 시에 현금으로 납부

○ 사업비 정산 : 사업종료 후 90일 이내 정산

□ 향후계획

○ 2014. 10월.       : 협약체결

○ 2014. 12월 이후   : 책임감리시행

따로 붙임 : 협약서(안) 1부. 끝.