문서번호	시설과-2878
결재일자	2014.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	홍순철	변규열	08/20 이춘희
협 조
	공원운영과장		代임예순
	주무관		代지정희

서울고등법원 옥상녹화

텃밭조성공사 등 2개공사 시행 계획

2014. 8.

동부공원녹지사업소

(시설과)

서울고등법원 옥상녹화

텃밭조성공사 등 2개공사 시행 계획

서울고등법원 등 2개소 옥상녹화·텃밭 조성 공사 실시설계용역 완료되어, 아래와 같이 공사시행 계획을 수립하여 추진에 만전을 기하고자 함

□ 공사 개요

❍ 공 사 명

- 서울고등법원 옥상녹화·텃밭 조성 공사

- 품질시험소 옥상녹화·텃밭 조성 공사

❍ 대상지 및 규모

연번	시 설 명	위 치	녹화면적(㎡)	총사업비 (백만원)	비 고
	계		2,383	819
1	서울고등법원	서초구 서초 중앙로 157	1,879	658	자부담 비율 50%
2	품질시험소	서초구 태봉로 131	504 (증 152)	161 (증 38)	추가 사업면적 포함

❍ 총공사비 : 775백만원

- 서울고등법원 : 628백만원(도급 582백만원, 관급 46백만원)

- 품질시험소 : 147백만원(도급 134백만원, 관급 13백만원)

❍ 공사기간 : 착공일로부터 90일간(‘14. 9~’14.11)

❍ 공사내용

- 서울고등법원

· 소나무 등 5종, 영산홍 등 9종, 꽃무릇 등 32종, 가제보 등 25종,               디딤돌 등 2종, 녹화기반공사 등

- 품질시험소

· 개량감국 등 23종, 가제보 등 21종, 디딤돌 등 3종, 방수공사 등

□ 추진 경위

❍ 2014. 1.20 : 사업시달(市조경과→시설과)

❍ 2014. 2. 3 : 사업추진계획 수립

❍ 2014. 3.14~04.22 : 건축물구조 안전진단 용역 시행

❍ 2014. 5.18~07.30 : 실시설계용역 시행

❍ 2014. 6.26~30 : 전문가 자문

❍ 2014. 7.31 : 신기술 활용심의(기술심사담당관)

⇒ 위원별 채택의견을 반영하는「조건부 수용」

❍ 2014. 8.14 : 市 계약심사 결과 통보(서울고등법원, 계약심사과→시설과)

⇒ 공사 3억원이상(조경) 市 계약심사 대상(서울고등법원)

❍ 2014. 8.18 : 자체설계 심사(품질시험소)

⇒ 공사 3억원미만 자체심사(품질시험소)

❍ 2014. 8.19 : 공사비 재배정 요청(시설과→市조경과)

□ 공사시행 계획

❍ 서울고등법원 옥상녹화·텃밭 조성 공사

- 공사입찰방법 : 제한경쟁

· 입찰참가자격 : 건설산업기본법에 의한 조경공사업으로 등록한 업체로 주된  사무소가 서울시에 소재한 업체

- 관급자재 구매 : 멀바우 판재 등 6종(46백만원)

⇒ 조달청 3자단가 계약 시행

❍ 품질시험소 옥상녹화·텃밭 조성 공사

- 공사입찰방법 : 전자공개수의계약

(지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조제1항제5호)

· 입찰참가자격 : 건설산업기본법에 의한 조경공사업으로 등록한 업체로 주된 사무소가 서울시에 소재한 업체

- 관급자재 구매 : 멀바우 판재 등 6종(13백만원)

⇒ 조달청 3자단가 계약 시행

❍ 업무담당(감독)자 지정

- 감독 : 임기제 8급 최종성

※ 시설관리공단 공사감독 위탁

❍ 대상지별 예산집행

- 예산과목

· 조경과, 생활주변녹지확충 및 시민참여활성화, 시민참여녹지조성,

옥상녹화 텃밭 조성, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

· 수요기관 자부담금 : 세입세출외현금

- 예산현황

(단위:천원)

연번	대상지	총예산	구조안전용역			실시설계용역			공사		비고
			배정액	원인행위액	잔액	배정액	원인행위액	잔액	배정액	발주액
	합계	781,000	11,847	10,690	1,157	21,738	20,220	1,518	785,745	775,005
1	서울고등법원	658,000	6,897	6,325	572	14,127	13,141	986	636,976	627,435	관급자재 포함 자부담비율 50%
2	품질시험소	123,000	4,950	4,365	585	7,611	7,079	532	148,769 (추가면적사업비 포함)	147,570	관급자재 포함 추가면적 사업비 포함

□ 추진일정

❍ 2014. 8.	: 공사 발주 및 관급자재 구매요청

❍ 2014. 9.~ 11.: 공사시행

❍ 2014. 12.     : 시설물 인계. 끝.