문서번호	도로보수과-8717
보존기간	년
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
최정필		이규철	09/30 김만수
협조
	주무관		이상하

「2014년 노후포장도로 정비공사-서부」

하반기 예산배정에 따른 공사시행계획

2014. 9.

「2014년 노후포장도로 정비공사-서부」

하반기 예산배정에 따른 공사시행계획

우리사업소에서 시행중인 『2014년 노후포장도로 정비공사-서부』공사와

관련하여 2014년 하반기 예산배정에 따라 다음과 같이 시행하고 안전하고

편안한 도로환경을 제공코자 함

관련근거

ㅇ 2014년 하반기 노후포장도로 예산배정(도로관리과-13756(‘14.9.15.))

공사개요

ㅇ 공 사 명 :「2014년 노후포장도로 정비공사 - 서부」

ㅇ 사업규모 : 절삭후 아스팔트 덧씌우기 1,556a

ㅇ 공사기간 : 2014. 5. 19 ~ 12. 31

ㅇ 계약업체 : (주)테크원이앤씨 대표 최호남

ㅇ 총공사비 : 4,670,504,500원

(도급비 1,440,460,000원, 관급비 3,104,044,500원, 이전비 126,000,000원)

예산현황

(단위:백만원)

예산액	배 정 액			집행액	잔액	비고
	배정누계	기 배정액	금회 배정액
5,762	5,762	4,942 ·노후포장: 4,371 ·대표도로 : 421 ·예방적 : 150	820	821	4,941 (낙찰차액 및 금회배정액 포함)

ㅇ 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도개특),

노후포장도로정비 공사, 시설비및부대비, 시설비

사업시행 방안

ㅇ 당초 계약된 사업에 하반기 예산을 포함하여 설계변경(증액) 시행

ㅇ 시행사유

- 하반기 배정된(9/16) 예산을 신규사업 발주시 설계 및 계약심사에서 계약체결 및 착공준비까지 많은 기간이 소요되며,

- 금년 여름 우기철에 중앙버스전용차로 상의 포트홀, 침하, 소성변형 및 균열 등이 집중적으로 발생되어 도로포장정비가 시급하여 당초 계약된 사업에 포함 시행하여 안전하고 편안한 도로환경을 제공코자 함

공사시행 노선

포트홀,침하,소성변형이 발생되어 동절기 전 정비가 시급한 중앙버스전용차로에 대하여 하반기 배정된 예산(820백만원) 우선 투입

ㅇ 당초 계약된

ㅇ 중앙버스전용차로 정비계획 노선

연번	노선명	정비차로	정비 규모	포장두께(㎝)	개략 소요예산 (천원)
계					805,449
1	한강로	중앙버스전용	B=3.5~7.0m, L=1,440m, A=53.2a	표층 5㎝, 개질 증층 15㎝, BB-2	329,840
2	수색로	중앙버스전용	B=7.0~9.0m, L=650m, A=51.9a	표층 5㎝, 개질 증층 15㎝, BB-2	321,780
3	마포로	중앙버스전용	B=3.5m, L=320m, A=11.2a	표층 5㎝, 개질 증층 15㎝, BB-2	67,029
4	통일로	중앙버스전용	B=3.5m, L=400m, A=14.0a	표층 5㎝, 개질 증층 15㎝, BB-2	86,800

향후계획

ㅇ ‘14.10.07 : 하반기 예산배정에 따른 설계변경(증액) 시행 예정

ㅇ ‘14.11.10 : 공사완료 예정

ㅇ ‘14.11.20 : 공사준공 예정

붙임 : 1) 중앙버스전용차로 정비공사 설계내역서 1부.

2) 2014년 하반기 노후포장도로 정비 예산배정 1부.  끝.