문서번호	토목부-18880
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		명경출	09/30 노우성
협조
	주무관		양준식

공사시행 계획 보고(8차공사)

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

공사시행 계획 보고(8차공사)

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

강남순환도시고속도로 8공구 건설공사의 2014년 예산편성에 따라 8차공사를 발주하고자 보고 드림

※ 2014년 편성예산 36,385백만원

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 2개소, 지하차도 4개소)

❍ 공 사 비 : 222,995백만원

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7. 31.(8차: 착수일로부터 `15.8.31.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1

❍ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

추진경위

❍ 2002. 07. 03. : 공사착수

❍ 2003. 06. 02. : 공사중단(고가차도 반대민원)

❍ 2003. 11. 19. : 고가차도 지하화 시행방침(부시장 제395호)

❍ 2011. 02. 17. : 양재대로 지하차도 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ 2011. 03. 01. : 공사재개

❍ 2014. 09. 16. : 과천시구간 도시계획사업 실시계획 인가고시

❍ 2014. 09. 24. : 구룡지하차도 개통

공사발주계획

❍ 발주금액(8차)

(단위 : 천원)

전 체	1 ~ 7차	금회(8차)	잔 여 분	비고
222,995,000	41,918,500	12,480,000	168,596,500

❍ 주요공종

- 교량 2개소 540m

⦁ 강교제작 2,151톤, 본선하부공 P3, P4, 주암교(교각 2개소, 교대 2개소)

- 지하차도 3개소 2,310m

⦁ 화물터미널앞 900m, 제2염곡 640m, 구룡 770m(가시설해체)

❍ 공사기간

- 착수일로부터 2015. 8.31.까지

검토의견

❍ 2016년 5월 강남순환도시고속도로 전구간 개통에 차질이 없도록 강남순환도로(민자구간) 접속구간의 주암교 및 본선교량을 우선 시공하고자 함

붙 임 : 1. 주요공사내용 1부.

2. 설계서 1부.

3. 예정공정표 1부.  끝.