문서번호	조경지원과-10581
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경지원과장	동부공원녹지사업소장
채해바래		김제중	09/30 이춘희
협 조
	주무관			김덕수
	주무관			박종천

<천호공원 및 길동생태공원 시설물 정비공사>

설계 변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  9

동부공원녹지사업소

조경지원과

「천호공원 및 길동생태공원 시설물정비공사」

설계변경(정산)검토보고

「천호공원 및 길동생태공원 시설물정비공사」 관련 제경비 정산 및 폐기물 실처리 물량으로 설계에 반영하고자 설계변경(정산) 검토 보고함.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 천호공원 및 길동생태공원 시설물 정비공사

공사기간 : 2014. 7. 28 ~ 2014. 10.5

계약금액 : 금96,052,000원(금구천육백오만이천원)

도 급 자 : 성보종합조경(주) 대표 정구헌

주요공종

- 시설물공 : 대나무울타리 460m 설치, 전기온풍기 4대 교체 등

- 식 재 공 : 영산홍 등 3종 4,000주

- 철 거 공 : 대나물울타리 등 철거

관급자재

- 메시형울타리 16경간, 이동식 초소 1개소, 운동시설 4개소

Ⅱ		설계변경(정산)내역

변경(정산)사유

- 환경보전비 및 건강보험 등 보험료 정산

‧ 환경보전비 201,397원 → 0원, 건강보험 445,278원 → 0원

노인장기보험료 29,166원 → 0원, 국민연금보험 652,201원 → 0원

건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료 87,272원 → 0원

- 기존 대나무울타리 및 수목잔재 등 폐기물 실처리 물량 반영

‧ 폐콘크리트 13.91ton, 혼합폐기물 14.51ton

- 기존 대나무울타리 지주대 기초철거 물량 정산

‧ 지주대 기초철거 200개소 → 100개소

주요변경(정산) 내역

공종별	설 계 변 경 내 용	비 고
경비	○ 환경보전비 및 건강보험 등 보험료 정산 - 환경보전비 201,397원 → 0원, 건강보험 445,278원 → 0원 노인장기보험료 29,166원 → 0원, 국민연금보험 652,201원 → 0원 건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료 87,272원 → 0원
철거공	○ 기존 대나무울타리 지주대 기초철거 물량 감 - 지주대 기초철거 200개소 → 100개소
폐기물 처리비	○ 수목 및 대나무울타리 제거 잔재 등 폐기물 실처리 물량 조정 - 폐콘크리트 2.5ton→13.91ton, 혼합폐기물25ton→ 14.51ton

공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		공 사 비				비 고
		당 초 (A)	1차변경 검토보고	정산변경 (B)	증 감 (B-A)
총 공 사 비		112,475,200	124,300,000	122,366,970	9,891,760
도급비	공급가액	87,320,000	96,857,300	95,100,000	7,780,000
	부가가치세	8,732,000	9,685,740	9,510,000	778,000
	계	96,052,000	106,543,040	104,610,000	8,558,000
관 급 자 재 대		16,423,200	17,756,960	17,756,960	1,333,760

Ⅲ		예산확보방안	: 낙찰차액 사용

예산내역

(단위 : 원)

사업명	발주금액	도급액	낙찰차액	비고
천호공원 및 길동생태공원 시설물 정비공사	107,876,800	96,052,000	11,824,800 (금회사용액 : 8,558,000)	관급자재 증가분 기사용

Ⅳ		조치계획

공사시행에 증가되는 금액에 대하여는 집행잔액(낙찰차액)을 사용하고

설계변경(정산) 내용은 계약부서 및 시공업체에 변경계약토록 조치하고자 함.

붙  임 : 변경내역서 1부. 끝.