문서번호	교량보수과-3733
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
배상현		09/30 김환겸
협조

자동차전용도로 일상유지보수공사 관급자재 물량변경 보고

2014. 9

교량보수과

자동차전용도로 일상유지보수공사 관급자재 물량변경 보고

『2014년 자동차전용도로 일상유지 보수공사-동부』와 관련 관급자재(아스콘)에 대하여 물량변경 계획을 수립 자동차전용도로 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : 2014년 자동차전용도로일상유지보수공사(연간단가)-동부

공사기간 : 2014년 04월 07일~2015년 02월 28일

총공사비 : 523,739,000원

- 도급비 : 477,739,000원

- 관급비 :  36,000,000원

공사개요 : 관내 자동차전용도로 일상유지보수 1식

도 급 사 : 엠투케이 건설(주)  대표 이명규

Ⅱ		구매현황 및 변경계획

구매현황

품 명	규 격	단위	단가	수량(톤)	소요금액	비 고
아스팔트콘크리트	일반, 표층용, WC-4(#67)	톤	72,694원/톤	400	29,234,610원

변경계획

- 당초 추정물량 구매의뢰 했었던 아스팔트콘크리트에 대하여 물량변경을 통하여

남는 금액을 정밀안전진단(정밀점검) 지적시 미 조치된 사항에 대하여 추가 정비

코자 함.

- 물량변경 : 당초 400톤 → 변경 : 0톤

Ⅲ		행 정 사 항

관리단속과에 의뢰하여 관급자재 물량변경 조치코자 함.  끝.