투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(암사대교-총차)

1. 우리본부에서 시행중인 「암사대교 건설공사(총차)」에 대한 준공기한을 아래와 같이 연기코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 암사대교 건설공사

나. 도 급 비 : 189,027백만원

다. 공사기간 : 2006. 03.23 ~ 2014. 09. 30

라. 도 급 자 : 현대건설(주)

마. 공사기간 연기내역

구 분	당 초	변 경	비 고
총차	2006. 3.23. ~ 2014. 9.30.	2006. 3.23. ~ 2014.12.10.	증71일
14차	2014. 5. 1. ~ 2014. 9.30.	2014. 5. 1. ~ 2014.12.10	증71일

※ 총차 기간은 계약상대자의 업무 편의를 위해 명기한 사항으로, 기간 변경 등을 이유로 간접비 등 계약금액을 조정 할 수 없습니다(관련근거:건설총괄부-18413호_2013. 9.25.)

붙 임 : 1) 준공기한 연기 방침서

2) 합의각서 1부(별도 송부).  끝.

	토목부장
주무관	조양연		광역도로과장	최광무		토목부장	09/30 노우성
협조자
시행	토목부-18865	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	0237082557	/전송	0237082599	/	choaral@seoul.go.kr	/	대시민공개