투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	서울숲공원 나비테마존 조성공사 설계변경 시행

『서울숲공원 나비테마존 조성공사』에 대하여  아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 서울숲공원 나비테마존 조성 공사

나. 공사기간 : 2014. 07. 30 ~ 2014. 10. 02

다. 도 급 액 : 금161,345,000원

라. 도 급 자 : ****************

마. 공 정 율 : 95%

바. 예산과목 : 동부공원녹지사업소공원운영과, 공원녹지관리수준향상및도시녹화지원, 공원.녹지관리수준향상, 공원관리및도시녹화지원, 동부공원녹지사업소산하공원유지관리, 서울숲공원시설물정비, 시설비

사. 설계변경사유 : 현장여건에 따른 물량 변동

아. 공사비 변경내역

구 분		공 사 금 액 (단위 : 원 )			비 고
		당 초	변 경	증 감
총 용역비		161,345,000원	175,065,000원	13,720,000
도급비	공급가액	146,677,273원	159,150,000원	12,472,727
	부가가치세	14,667,727원	15,915,000원	1,247,273
	계	161,345,000원	175,065,000원	13,720,000

붙 임 : 1. 설계변경내용 및 설계도서 각 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부(별첨).  끝.

주무관	김윤수		시설팀장	송복식		서울숲공원관리사무소장	허현수		동부공원녹지사업소장	09/30 이춘희
협조자	주무관	김인선		주무관	김덕수
시행	서울숲공원관리사무소-8912	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울시 성동구 뚝섬로 273(성수1가1동685번지)	/
전화	(02)460-2918	/전송	(02)460-2930	/		/	부분공개