투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 변경요청 승인알림(답십리16구역)

1. 삼성물산(주) 답십리16 제2014-09-11호(2014.09.29.) 및 영호이앤씨 영원 14-09-10호(2014.09.22.)와 관련입니다.

2. 위 호의 교통안전시설물 원인자 부담공사 변경요청을 아래와 같이 승인 하오니「교통안전시설 설치공사 원인자 등 준수사항」에 알맞게 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 교통안전시설물 원인자 부담공사(답십리16구역)

나. 공사위치 : 서울시 동대문구 답십리16구역 공사구간

다. 공사기간 변경 및 공사참여자

구분	시공	설계	감리	원인자	공사기간		변경사유
					변경전	변경후
신호	미래월드안전(주)	㈜건영이앤씨	㈜영호이앤씨	삼성물산(주)	2014.08.20.~2014.09.30	2014.08.20.~2014.10.30	토목공사 지연으로 인한 공기 연장
표지	가온건설				2014.09.05.~2014.09.30	2014.09.05.~2014.10.30

라. 변경내용

위치	변경전	변경후	승인조건
한전간판	부착대 7m 설치	부착대 9m로 변경 설치	차량소통시 민원이 발생되지 안도록 시공함을 조건으로 승인함
한전간판(연동)	아스팔드 횡단굴착 지중화	가공선로로 변경 설치	민원발생 최소화 하여 시공함을 조건으로 승인함
	보행지주 신설	차량등 지주에 보행등 통합설치	보행자 통행이 원활함을 조건으로 승인함
	제어기 신설	제어기 위치조정	준공후 신호선로 유지보수시 불편함이 없음을 조건으로 승인함.

. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	삼성물산(주),(주)영호이앤씨
주무관	차준원		주무관	채희준		기전과장	09/30 최주용
협조자
시행	기전과-6833	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차 시장길 41(용답동) 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1541	/전송	02-2210-1536	/	michael3770@seoul.go.kr	/	대시민공개