문서번호	방재시설부-9662
결재일자	2014.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	방재시설과장	방재시설부장
이정국	서관석	10/01 임춘근

신림2 빗물펌프장 설치공사

도림천 둔치 산책로 확보방안 검토보고

2014. 10

도시기반시설본부

방재시설부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 ■	(	감리사, 시공사 등	)		무 □
	●	전문가	:	유 ■	(	원 설계사 등	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

도림천 둔치 산책로 확보방안 검토보고

본 펌프장 공사와 인접한 도림천 둔치(좌안)에 기 설치된 산책로(보행+자전거) 중 일부구간(L=71m)에 미확보된 보행로(B=2m) 및 통수능 확보방안 검토 보고임

□ 관련근거

○ 관악구 치수과-8553호(2014.6.13)

- 신림2 빗물펌프장 설치관련 재검토 요청

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 신림2 빗물펌프장 설치공사

○ 공사규모 : 집수정 V=5,300㎥ / 토출관로 W2.5×H1.0 × 3련

○ 공사기간 : 2013. 01. 04. ~ 2014. 12. 15

○ 도 급 비 : 6,626백만원

○ 시 공 사 : 임원개발(주)외 1

○ 감 리 사 : ㈜도화 외 1

□ 보고내용

○ 도림천 둔치 산책로(보행+자전거) 현황 및 문제점

- 기 설치된 산책로는 보행로 미확보로 자전거와 보행자간 충돌위험 상존

- 통수단면 부족으로 유수소통 장애 초래

- 현장 여건상(진입로도 등) 본 공사와 별도 추진시 시공 곤란

- 자재창고, 차량통행로 및 준설토 야적장 설치공간 부족

당 초
변 경

○ 도림천 둔치 산책로 중 보행로(폭 2m) 및 통수능 확보방안

- 제방 법면 자연석 쌓기를 옹벽으로 대체

☞ 옹벽(L형) 규모 : B=3.6M, L=71M, H=5.0M

당 초	변 경
3,500 4,000

○ 물량 증ㆍ감 현황

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당 초	변 경	증ㆍ감
◎ 산책로(자전거도로) 옹벽설치
(1) 토공사	흙깍기 및 잔토처리 외	㎥	0	3,195	3,195
(2) 옹벽설치	H=5.0m B=3.6m L=71.0m	m	0	71	71
(3) 신설산책로 포장		㎡	0	120	120
(4) 임시자전거우회도로	B=3.0m , L=98.0m	m	0	98	98

○ 공사비 증ㆍ감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감		비 고
◎ 산책로(자전거도로) 옹벽설치
1) 토공사	0	40,223	증)	40,223
2) 옹벽설치	0	43,902	증)	43,902
3) 신설산책로	0	3,608	증)	3,608
4) 임시자전거우회도로	0	14,535	증)	14,535
직접공사비계	0	102,268	증)	102,268
제경비	0	57,232	증)	57,232
도급액	0	159,500	증)	159,500
관급자재비	0	43,900	증)	43,900
총 공사비	0	203,400	증)	203,400

○ 책임감리원 검토의견

- 관악구청 요청 옹벽 설치안은 자재창고 및 준설토 야적장 설치와 자전거도로 확폭(보행로 확보)을 위해서는 필요하며,

- 현장주변 여건을 고려할 때 본 펌프장 공사시 병행 시공함이 적절하다고 사료됨.

□ 보고내용

○ 상기 책임감리원 보고내용과 같이 관악구청 요청(안)대로 자연석 쌓기를 옹벽으로 대체하여 도림천 둔치 산책로(보행로) 및 통수능 확보뿐만 아니라 자재창고, 준설토 야적장 및 이용차량 통행로 확보를 위하여 필요하다고 판단되며,

○ 현장 주변 여건(공사용 차량 등 장비 접근성 등)을 고려할 때 본 펌프장 공사와 병행 시행함이 타당하다고 판단되므로 우선 시공토록 조치하고 본부 설계변경 소위원회 심의를 거쳐 추후 설계변경시 반영코자함.

첨부 : 책임감리원 검토의견서 1 부. 끝.