문서번호	방재시설부-9630
결재일자	2014.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
임병길		서관석	10/01 임춘근
협조

준공기한 연기 검토 보고

《송정,사근 빗물펌프장 증설공사》-전체, 2차, 3차

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

도시기반시설본부

방재시설부

공사,용역 준공기한 연기 검토 보고

《송정, 사근 빗물펌프장 증설공사》-전체, 2차, 3차

공사개요

위    치 : (송정) 성동구 송정동 81-5, (사근) 성동구 사근동 198-5

규    모 : 송정펌프장증설 Q=616㎥(2대), 토출관로 D=2,100mm→2,600mm,L=70m

사근펌프장증설Q=1,020㎥(2대), 토출관로 D=2,800mm, L=36m

공사기간 : 2012. 12. 27 ~ 2014. 10. 31

도 급 비 : 7,476백만원(1차 1,844백만원, 2차 4,887백만원, 3차 745백만원)

시공사 및 감리단 : 경동산업(주)외1/ 서울시시설관리공단

관련근거

관련근거 : 서울시시설관리공단 공사감독2처-16222호(2014.9.30)

- 시설공사 및 폐기물처리용역 준공기한 연기검토 보고

추진경위

2013. 8 : 사근펌프장 토출관로(D2,800mm, L=36m)설치완료

2013.10 : 송정펌프장 기존건물 부분철거 완료

2014. 2 : 송정펌프장 강관추진 (D2,600mm, L=70m, 2열)완료

2014. 7 : 사근펌프장 증축동 골조공사 완료

2014.10 : 사근펌프장 전기, 기계설비 설치중

2014.10 : 송정펌프장 증축동(3층)골조 공사중

준공기간 연기사유

시설공사

- ‘14년 수방기간(‘14.5.15∼10.15) 이후 기존 Box 내부에 가동보(2개소, 폭 3.5～5m, 높이 1.0～1.5m )설치에 따른 공기 부족

- 관리자 숙소 도시가스 인입공사 추가 시행에 따른 공기 부족 (구청 요구사항)

- 성동구청 기동반 사무실 (숙소 및 창고) 철거 지연에 따라 본공사 착공 순연

공사기간 변경내용 (전체, 2차, 3차분)

구 분	당 초	변 경	비 고
총차분	2012.12.27~ 2014.10.31	2012.12.27~ 2014.12.30	60일 연기
2차분	2012.12.27~ 2014.10.31	2012.12.27~ 2014.12.30
3차분	2014.6.13~ 2014.10.31	2014.6.13~ 2014.12.30

※ 도급금액 변경없음

연기에 따른 귀책사유 : 도시기반시설본부

지체상금 부과여부    : 미부과

페기물처리 용역 준공기간 연기사유

용 역 명 : 송정,사근빗물펌프장 증설공사 건설폐기물처리용역

용역기간 : 2013.3.15.～2014.10.31

용역규모 : 폐아스콘 3,502톤, 건설폐재류 2,206톤, 폐아스콘 150톤

용 역 비 : 총차 196백만원 (1차 138백만원, 2차 58백만원)

용 역 사 : ㈜벽성그린산업  대표 황윤남

연기사유

- 본 공사 준공기한 연기와 연계하여 폐기물처리용역 준공기한 연기 필요

용역기간 변경내용 (전체, 2차분)

구 분	당 초	변 경	비 고
총차분	2013.3.15 ~ 2014.10.31	2013.3.15 ~ 2014.12.30	60일 연기
2차분	2014.7.01 ~ 2013.6.19	2014.7.01 ~ 2014.12.30

연기에 따른 귀책사유 : 도시기반시설본부

지체상금 부과여부    : 미부과

조치계획

감리원이 제출한 시설공사 및 폐기물처리용역의 준공기한 연기 실정보고에 대하여 내용검토 한 바 타당하기에 준공(용역)기한을 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자함.

붙임 : 감리단 공문서 1부. 끝.