투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	「시립고덕양로원 등 2개소 녹색자금 시행 공사」 설계변경 시행

『시립고덕양로원 등 2개소 녹색자금 공사 시행』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 시립고덕양로원 등 2개소 녹색자금 시행 공사

2. 공사기간 : 2014. 07. 07 ~ 2014. 10. 04

3. 총공사비 : 105,227,060원 (도급 98,282,770원 관급 6,944,290원)

4. 도 급 자 : ㈜강건종합건설 대표 김영환

5. 설계변경사유 : 현장여건에 따른 물량증감 및 신규공종발생

6. 공사비 변경내역

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		105,227,060	116,922,290	11,695,230
도급비	공 급 가 액	89,347,973	99,980,000	10,632,027
	부가가치세	8,934,797	9,998,000	1,063,203
	계	98,282,770	109,978,000	11,695,230
관 급 자 재 비		6,944,290	6,944,290	-

※ 예산과목 : 세입세출외 현금(녹색자금)

붙임 : 1. 변경설계서 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부.  끝.

	동부공원녹지사업소장
주무관	최종성		시설팀장	홍순철		시설과장	변규열		동부공원녹지사업소장	10/02 이춘희
협조자	주무관	김인선		주무관	김덕수		공원운영과장	박경애
시행	시설과-3285	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소	/
전화		/전송	02-2181-1169	/		/	대시민공개