함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	작업기간 연기요청에 대한 회신

1. 상수도공사관리처-16370('14.10.01)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 시설물보수 작업지시(시설물보수-27~35)에 대한 작업기간 연기요청 사항을 아래와 같이 승인.회신하오니 감독업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

○ 대상 및 현황

지시번호	위치	지시내용	작업기간(당초)	연기요청사유	연기요청(승인)일	비고
시보-27~30	명일동 47-12외 3개소	철개교체	‘14.9.16 ~10.01	주변 상가로부터 단수일정 변경요청	2014.9.02 ~ 10.17	공단 의견 승인
시보-31~34	명일동 47-2외 3개소	철개 및 밸브교체	‘14.9.17 ~10.02
시보-35	천호동 238-1	밸브교체	‘14.9.18 ~10.06	관할 경찰서 협의기간소요

붙임 : 실정보고서 1부.  끝.

							강동수도사업소장
주무관							황대룡			주무관					송종범					시설관리과장					전결 10/02 代송종범
협조자
시행			시설관리과-15343									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		3146-5208						/전송								/	daeryong@seoul.go.kr												/	대시민공개