투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	돈화문 국악예술당 건립 통신공사(1차) 준공기한 연기의뢰

1. 우리본부에서 추진중인 『돈화문 국악예술당 건립 통신공사(1차)』준공기한을 아래와 같이 연기의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사항

구 분		당 초	변 경	비 고
공 사 명		돈화문 국악예술당 건립 통신공사(1차)
공사기간	총 차	2013.12.23~2015.06.22	2013.12.23~2015.06.22	변경없음
	1차	2013.12.23~2014.10.22	2013.12.23~2015.06.22	243일 연장
계약금액		금306,739,040원 (1차 50,000,000원)	금306,739,040원 (1차 50,000,000원)	변경없음
계 약 자		㈜에스앤티에스 대 표 공석복

2. 변경사유 : 문화재 발굴, 민원발생 등으로 인한 선행 공종인 토목공사 지연에 따른 후속 공종인 전기공사 지연.

붙임  1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	설비부장
★주무관	유영선		시책사업과장	이흥복		설비부장	10/02 박기형
협조자
시행	설비부-10833	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길 15, 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8650	/전송	02)3708-8659	/	ysy12290@seoul.go.kr	/	대시민공개