문서번호	급수운영과-19311
결재일자	2014.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장	서부수도사업소장
김병주	강동철	장종욱	10/02 설동을
협 조
	★행정지원과장		이희세

준공기한 연기검토 보고(합정동 433-1호외 4개소 세척갱생관 정비공사)
「합정동 433-1호외 4개소 세척갱생관 정비공사」 준공기한 연기 검토보고
ㅣ

2014.10.

서부수도사업소

「합정동 433-1호외 4개소 세척갱생관 정비공사」

준공기한 연기검토 보고

우리사업소에서 공사발주하여 서울시시설관리공단에 공사감독 위탁하여 진행중인 “합정동 433-1호외 4개소 세척갱생관 정비공사”와 관련하여 시설관리공단으로부터 준공기한 연기 보고서가 접수되어 검토결과를 보고드림 【관련근거:공사감독2처-16000(2014.9.26.)호】

Ⅰ		공사 개요

가.공 사 명 : 합정동 433-1호외 4개소 세척갱생관 정비공사

나.공사기간 : 2014.4.14 ~ 10.10

다.공사내용 : D=20~200mm, L=1,112m

라.도 급 비 : 229,834,980원

마.시 공 사 : **************

Ⅱ		공사진행 현황

가.공 정 율 : 100% (2014.10.1.현재)

1) 구간별 작업사항 : 1구간(합정동) D=200mm, L=280m

2구간(서교동) D=150mm, L=250m

3구간(서교동) D=150mm, L=230m(※10.1일 완료)

4구간(성산동) D=200mm, L=110m

5구간(성산동) D=150mm, L=170m

Ⅲ		준공기한 연기요청

가.준공기한 연기요청내용

1) 준공연기 사유

- 3구간 도로굴착 및 점용 허가지연으로 인한 절대공기 부족

- 굴착허가일 : 2014.8.28.(허가번호:마포구-2014-상수-00076)

- 허가  기간 : 2014.9.22.~10.12.

2) 준공기한 연기 요청일 : 31일

- 당 초 : 2014.4.14. ~ 10.10.

- 변 경 : 2014.4.14. ~ 11.10

Ⅳ		준공기한 연기 검토의견

가.사업소 검토의견

- 3구간(서교동 369-5 ~ 358-28호간)은 당초 일부구간(70m)이 2014.10월까지 굴착통제 구간이었으나 관노후에 따른 공사의 시급성을 고려하여 추진된 구간으로,

- 도로관리청(마포구청)의 내부검토 지연으로 굴착승인이 늦어져 절대공기가 부족한  상황으로 굴착 및 관교체공사는 완료되었으나 설계변경과 후속조치를 위하여 준공기한을 연기함이 타당할 것으로 판단됨.

나.준공기한 연기

- 당 초 : 2014.4.14. ~ 10.10.

- 변 경 : 2014.4.14. ~ 11.10.

- 귀책사유 : 발주청

- 지체상급 부과여부 : 미부과

Ⅴ		조치 계획

가. 검토결과 시설관리공단의 준공기한 연기 사유가 타당하므로 서울시 재무과에      준공기한 변경계약을 요청하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 시설관리공단 준공기한 연기요청 관련서류 1부. 끝.