투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	우이신설경전철(주) 대표이사 귀하
(경유)
제 목	우이-신설 도시철도(경량진철) 민간투자사업 공사추진 철저

1. 도시철도계획부-5045호(‘14.9.29), 도시철도사업부-6084호

(‘14.9.29)와 관련입니다.

2. 우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 건설공사가  ‘14.9.25일 현재 실적공정이 52.8%로 계획대비 실적이 저조한 실정입니다.

3. 특히 L01정거장에서 L05정거장은 차량시운전이 선행되어야 하는 구간이나 L03정거장과 2공구 본선1․4․5구간은 토공이 완료되지 않은 상태이며,  L05~L07정거장, L09~L11정거장은 구조물 공사 지연으로 후속 공종으로의 인계가 이루어지지 않는 등 계획 공정에 영향을 주고 있는 것으로 보고 되고 있는 바,

4. 우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 실시협약 제23조 제4항 에 의하면 『실적 누계공정률이 누계 계획 공정률 대비 90% 미만인 경우에는 부진공정 만회대책을 수립하여 감리자의 확인을 거쳐 주무관청에 제출되도록 하여야 한다』고 되어 있고, 동 협약서 제8조와 제11조 제1항에 의하면 『신의에 따라 성실히 협약을 이행』하도록 되어 있음을 감안하여 지연된 공정에 대하여는 만회대책 수립·추진에 철저를 기하여야  할 것이며, 아울러 공정만회대책은 ‘14.10.13까지 우리본부로 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	안창호		경전철2과장	이승우		도시철도사업부장	10/02 한동근
협조자	주무관	임병관		경전철1과장	代안규홍
시행	도시철도사업부-6252	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 삼일대로 231(예장동 산5-85) 시청남산별관 3층	/
전화	02-772-7189	/전송	02-772-7135	/	changho@seoul.go.kr	/	대시민공개