투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	수방기간 종료에 따른 업무협조 요청(염창2 빗물펌프장)

1. 우리 본부에서 시행하는 『염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 공사』와 관련하여 수방기간 종료(2014.10.15)에 따라 전기 및 기계공사 추진을 위하여 아래와 같이 업무 협조요청 하오니 2014.10.20(월)까지 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 기전설비 설치 계획

-‘14.10.21 ~ 22 : 수배전반 이설 및 설치

-‘14.10.23 ~ 24 : 펌프 반입 및 설치

- 사용 건설장비  : 200톤 크레인

나. 협조요청 사항

- 전기설비 이설에 따른 임시 수배전실 가설물 철거

- 펌프 설치를 위한 장비 반입구(지붕) 규격 변경(원형→사각) 설치 요청

- 장비반입을 위한 알피피 방음판 해체 등.  끝.

	설비부장
수신자	토목부장,건축부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	권오식		설비부장	10/02 박기형
협조자	주무관	추한영
시행	설비부-10860	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	대시민공개