문서번호	건축부-11828
결재일자	2014.10.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
윤용훈		강성욱	10/02 김우성
협조
	주무관		김대식

『서남권 돔야구장 건립공사』

구조체공사 Fast Track 공사추진 실정보고 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『서남권 돔야구장 건립공사』

구조체공사 Fast Track 공사추진 실정보고 검토 보고

『서남권 돔야구장 건립공사』의 구조체공사(실내연습실 및 스카이박스) Fast Track 공사추진 관련 실정보고가 있어 검토 보고

1		사업개요

위 치 : 구로구 고척동 63-6번지일대 규 모 : 지하2/지상4층, 총면적 81,215㎡ 공사기간 : 2009. 2 ~ 2015. 2 시 공 사 : 현대산업개발(주) 외2개사 감 리 사 : ㈜선엔지니어링 외2개사 총사업비 : 195,045백만원

2		실정보고 내용

시설개선 관련 구조공사 선시행 범위 (도면 : 별첨 실정보고서 참조)

- 스카이박스 실구획 골조공사, 철골공사[H-Beam, Plate보강(보부위) 및 Deck Slab설치

- 스카이박스용으로 추가 설치되는 엘리베이터 골조공사

- 실내연습실 중층 슬라브 골조공사

시설개선 관련 철거공사 (도면 : 별첨 실정보고서 참조)

- 스카이박스 부위 난간 및 기타 기능실 변경부위 관련 철거공사

- 개략 철거면적(㎡) 산출 집계표

구 분	조적벽체		철근콘크리트(RC)		블록벽 (6인치)	경량벽체	합 계
	0.5B	1.0B	벽체	바닥
지하2층	-	-	18.01	14.16	-	-	32.17
지하1층	141.84	129.56	253.19	10.01	-	-	534.60
지상1층	72.85	338.35	98.05	32.01	133.76	-	675.02
지상2층	22.73	102.00	65.33	10.01	-	-	200.07
지상3층	41.47	112.72	261.38	141.70	-	-	557.27
지상4층	-	-	-	-	-	5.31	5.31
합 계	278.89	682.63	695.96	207.89	133.76	5.31	2,004.44

※ 개략산출면적으로 추후 설계변경 시 세부수량 재산출 처리예정임.

변경사유

- 발주처 사유에 의한 사업추진계획 변경(시설개선)에 따른 설계변경으로, 공정준수를 위해 시설개선 실시설계 항목중 공정일정에 영향이 큰 Critical Path 구조체공사에 대한 선시공을 요청하는 사항임.

- 실정보고에 대한 공사비는 시설개선 관련 실시설계도면 및 내역서 제출시(2014년 10월말) 통합하여 제출 예정임.

『입찰안내서 관련규정』

2.1 공사계약 일반조건 제19조(설계변경 등)

① 설계변경은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 한다.

4. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

③ 제1항의 규정에 의한 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공전에 완료하여야 한다. 다만, 계약담당공무원은 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선시공을 하게 할 수 있다.

3		감리자 검토의견

발주처 사유에 의한 시설개선 추가공사로 인한 설계변경 대상공종 중 준공기한을 준수하기 위하여 Critical Path에 해당하는 스카이박스 신설 및 실내연습실 타설 등의 구조체공사는 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있다고 판단됨.

이에 따라 우선시공 실정보고 승인 후 설계변경 승인 이전에 우선 공사를 시행하면서 시설개선 관련 실시설계도면 및 내역서를 준비하여(2014년10월말) 설계변경  심의절차 등을 이행하고자 사전공사 승인을 건의함.

4		처리의견

시설개선 추가공사로 인한 설계변경 대상공종 중 준공기한을 준수하기 위하여 Critical Path에 해당하는 스카이박스 신설 및 실내연습실 타설 등의 구조체공사는 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있다고 판단되므로,

설계변경 이전에 선시공하도록 승인하고, 공사비는 향후 설계변경시 세부검토 처리코자 함.

따로붙임  (실내연습실 및 스카이박스) 구조체공사 Fast Track 공사추진 승인요청 실정보고 1부.  끝.