문서번호	토목부-19061
결재일자	2014.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		최광무	10/02 노우성
협조

동상방지층 제외 검토보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

동상방지층 제외 검토보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

국토교통부 도로 동상방지층 설계지침에 맞게 본 공사에 반영된 동상방지층을 설계내역에서 제외코자 하는 검토 보고임

※ 관련 규정 “도로동상방지층 설계지침(2012. 8. 국토교통부)”

■ 공사개요

◦ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

◦ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

◦ 공사기간 : 2012. 8. 2 ～ 2014.12.31

◦ 도 급 비 : 18,161백만원

◦ 시 공 사 : ㈜신성건설외 2개사

◦ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

■ 현 황

◦ 포장단면

구 분	단위	두께
계		500
표 층	mm	50
중 간 층	mm	60
기 층	mm	180
보조기층	mm	210

◦ 동상방지층 수량

구 분	규 격	1구간 (신설도로)	2구간 (확장구간)	3구간 (강일지구)	계	비고
동상방지층	T=40cm	3,809	7,307	-	11,116
동상방지층	T=46cm	-	-	3,300	3,300
동상방지층	백호포설	-	24	-	24
계		3,809	7,331	3,300	14,440

■ 감리단 검토의견

◦ 성토고 2m 이상 구간 이외에도 변경된 “도로 동상방지층 설계지침(2012. 8)에 의하여 동결깊이 검토결과 동결깊이 보다 포장층이 두꺼운 구간에 대하여 동상방지층을 제외 하는 것은 타당함.

- 동결깊이 : 43.3cm,   포장두께 : 50.0cm

■ 조치 계획

◦ 상기 감리단 검토의견과 같이 승인하여 공사 시행함이 타당하다고 사료되며 추후 설계 변경심의 결과에 따라 반영함이 타당함.

- 개략공사비 : 감)425백만원

붙  임 : 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.