문서번호	토목부-19054
결재일자	2014.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
박상철	최광무	10/02 노우성

공사장 휴일작업계획 보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

서울특별시도시기반시설본부

(토 목 부)

공사장 휴일작업 계획 보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

구리암사대교 연결도로 건설공사의 책임감리원이 요청한 휴일작업 계획에 대한 검토 보고임.

※ 휴일작업 : ′14.10. 3.~10.26.(매주 토·일요일, 공휴일 2일), 감리원 : 휴일당 1명

□ 공사개요

◦ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

◦ 규    모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,88km

◦ 도 급 비 : 18,161백만원

◦ 공사기간 : '12. 8. 2. ~ '14.12.31.

◦ 시 공 사 : ㈜신성건설외 2개사

◦ 감 리 단 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

▢ 관련근거

◦ 공사장 안전관리 강화를 위한 휴일작업 현장관리 개선방안 검토 보고

- 도시철도토목부-10681(‘13.11.14.) : 본부장 방침

▢ 책임감리 휴일 근무 및 대가지급 기준

◦ 단순 공정일때 감리원 미배치

- 단순 공정이고 5명이하 적은 인원이 작업할 경우 현장책임자(원청사 책임자)입회하에 작업하고, 작업내용을 사진 등을 첨부하여 감리단에 보고

◦ 작업중 주요 공정 발생시 감리원 배치하고 입회하에 공사 시행

◦ 감리원근무시 감리원 평일 대체근무 시행

▢ 휴일 작업기간 : 2014.10. 3. ~ 10.26, 매주 토·일요일, 공휴일

▢ 휴일 작업사유

◦ 구리암사대교 개통 일자 준수

▢ 주요 작업 공종

◦ 법면 절토, 비탈면 보호, 암 발파, 암 운반, 배수공

◦ 보강토 옹벽, PRN옹벽

◦ 행정사항

- 현장 관리 철저

- 안전사고 예방을 위한 5rp 시행 철저

▢ 감리단 검토 의견

◦ 상기 내용과 같이 공정 관리를 위하여 시공사가 제출한 휴일 작업은 필요하다고 판단됨.

▢ 조치계획

◦ 감리단에서 제출한 휴일 작업계획을 승인코자 합니다.

붙 임 : 휴일 작업계획 1부.  끝.