다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	환경부장관(자원재활용과장)
(경유)
제목	서울재사용플라자 사업비 증액 내역 보고

1. 서울시 재정담당관-9787(2014.9.4.)와 관련입니다.

2. 우리시에서 국비지원(30%) 사업으로 추진하고 있는 「서울재사용플라자」건립이 신재생에너지 비율 증가 및 외부디자인 변경 등으로 인해 사업비 증액이 불가피하여 시 투자심사를 거쳐 확정된 예산을 아래와 같이 보고하오니 추가된 국비 예산이 반영될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 사업비 변동 내역

(단위 : 백만원)

구 분	변경전	변경후	증 액	비 고
합 계	37,300	49,892	12,592	국비증액분‘15년 추가요청 예정
국 비	11,190	14,968	3,778
시 비	26,110	34,924	8,814

첨부 : 서울재사용플라자 조성 추진현황(사업비 증액) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	권영선		폐기물정책팀장	최규동		자원순환과장	10/05 최홍식
협조자
시행	자원순환과-14980	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3674	/전송	02-2133-1026	/	kwony@seoul.go.kr	/	대시민공개